정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①정책사업명

도암댐 상류 비점오염저감사업

② 추진배경

대관령면 고랭지밭에서 우기시 유실되는 토사, 퇴비 등 오염원으로부터 하천 생태계를 보호하기 위한 오염저감 대책

③ 사업개요

○ 사업목적 : 흙탕물이 하천으로 직접 유입되지 않고 침사지를                거쳐 방류되도록 유도하여 하천 수질 개선

○ 사업기간 : 2014. ~ 2020.

○ 위  치 : 대관령면 도암호 유역

○ 사업비 : 15,100백만원

(국비 10,570, 도비 680, 군비 679, 기금 3,171)

○ 주요내용 : 침사지 4개소(57,989㎡) 설치

구 분	위 치	시설규모	비 고
용산1리침사지	용산리 284-13 일원	3,456㎡	2017년 6월 준공
차항1리침사지	차항리 92-6일원	26,727㎡	2017년 6월 준공
횡계2리침사지	횡계리 143-2 일원	7,380㎡	2017년 6월 준공
차항2리침사지	차항리 96-1일원	20,426㎡	2020년 8월 준공예정

④ 사업부서

평창군 환경위생과

⑤ 담당자

장재석 과장

정희주 주무관

⑥ 선정기준

2. 대규모 사업

⑦사업기간

2014. ~ 2020.

<그간 주요 추진내용>

○ 용산1리, 차항1리, 횡계2리 침사지 조성 완료

- 기본 및 실시설계 환경부 승인 : 2015. 10.

- 공사착공 및 준공 : 2015.12. ~ 2017. 6.

‘17.05.26

어승담 부군수

장재석 과장

이용운 주무관

○ 차항2리 침사지 조성공사 추진 중

- 소규모 환경영향평가 승인 : 2018.10.

- 기본 및 실시설계 환경부 승인 : 2018.12.

- 공사 추진 : 2019. 4. ~ 2020. 8.

‘19.12.24.

송기동 부군수

최영훈 국장

장재석 과장

정희주 주무관