정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명

(농기계임대사업소신축) 방림면 농기계임대사업소 신축공사

② 추진배경

○ 권역별 농기계임대사업소 설치를 통해 원거리에서 임대농기계를 이용하는 농가의 이용 편익 도모

○ 농기계 구입이 어려운 농가에 농기계를 임대함으로써 농기계 구입부담을 경감하고 농작업 기계화율 제고 및 농촌 일손부족 해소

③ 사업개요

○ 사 업 명: 방림면 농기계임대사업소 신축공사

○ 사업내용: 농기계임대사업소 1개소 신축(지상2층, 연면적 951.79㎡)

○ 사업위치: 방림면 방림리 752-2번지 일원

○ 사 업 비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	2020	2021	2022
계	2,420	900	900	620
국 비	200	200	0	0
도 비	40	40	0	0
군 비	2,180	660	900	620

④ 사업부서

축산농기계과(농업기계팀)

⑤ 담당자

지영진 과장

최종춘 농업기계팀장

남범석 주무관

⑥ 선정기준

주요 군정 현안에 관한 사항

⑦ 사업기간

`20. 1. ~ `22. 12.

<그간 주요 추진내용>

○ 공사 재착공

`22. 11. 02.

지영진 축산농기계과장

최종춘 농업기계팀장

남범석 주무관

○ 문화재 정밀발굴조사용역 착수

- ‘22.10.27. 문화재 정밀발굴조사 완료

`22. 05. 20.

김승주 농기계임대사업소장

남범석 주무관

○ 공사중지

- 동절기 및 문화재정밀발굴조사용역에 따른 공사중지

`22. 01. 21.

김승주 농기계임대사업소장

남범석 주무관

○ 건축 외 6공종 착공

`21. 08. 30.

허목성 기술지원과장

김승주 농업기계팀장

남범석 주무관

○ 실시설계용역 착수

`21. 03. 02.

허목성 기술지원과장

김승주 농업기계팀장

남범석 주무관

○ 사업부지 매입

`20. 12. 08.

허목성 기술지원과장

김승주 농업기계팀장

박만수 주무관

○ 공유재산심의

`20. 04. 10.

김영목 기술지원과장

김승주 농업기계팀장

박만수 주무관