정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(경제분야 일반) 진부전통시장 주차타워 건설사업
② 추진배경	○ 진부전통시장의 주차공간 부족 및 노면주차에 따른 지역 민원을 조기 해소하고, ○ 내방객 편의시설 확충을 통한 시장경쟁력 강화로 진부전통시장을 평창북북권 대표 문화관광시장으로 육성코자 함.
③ 사업개요	○ 위 치 : 평창군 진부면 하진부리 85-1 외 5필지 ○ 사 업 량 : 주차타워 신축 1식(3층4단, 연면적 약 6,000㎡, 주차면수 190면) ○ 총사업비 : 9,441백만원(국비 5,665, 도비 1,132, 군비 2,644) - 건축기획 용역 : 23,256천원 - 실시설계용역 : 299,412천원 - 공사비(전기․소방․기계․통신 등 부대공사 포함) : 7,390,000천원 - 건설사업관리 용역 : 1,080,000천원 - 기타·부대비 : 648,332천원 ○ 사업기간 : 2021년 ∼ 2023년
④ 사업부서	경제과(경제정책팀)	⑤ 담당자	김남섭 과장 문병덕 경제정책팀장 박유진 주무관
⑥ 선정기준	군이 발주하는 30억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	`21. 1. ~ `23. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 진부전통시장 주차타워 건립 부지 매입 계획 수립 (일자리경제과-7116호)		`19. 10. 21.	한욍기 군수 송기동 부군수 최영훈 경제건설국장 최찬섭 경제과장 김남호 경제정책팀장 강철희 주무관
○ 진부전통시장 주차타워 건립 부지 매입 변경 계획 수립(일자리경제과-22094호)		`20. 4. 22.	송기동 부군수 최영훈 경제건설국장 최찬섭 경제과장 김남호 경제정책팀장 이기언 주무관
○ 진부전통시장 주차타워 건립 부지 매입 완료		‘20. 5. 27.	최찬섭 경제과장 김남호 경제정책팀장 이기언 주무관
○ 중기부 주차환경개선사업(진부전통시장 주차타워 건립사업) 공모사업 선정		‘20. 9. 16.	김재봉 경제과장 김남호 경제정책팀장 임정학 주무관
○ 진부주차타워 건립부지 환경 정비 (부지 정비 및 폐기물 처리) (일자리경제과-64380호)		`20. 12. 03.	김재봉 경제과장 김남호 경제정책팀장 임정학 주무관
○ 평창군 진부전통시장 주차타워 건립 건축기획 용역 시행(일자리경제과-8294)		`21. 2. 15.	김재봉 경제과장 김남호 경제정책팀장 임정학 주무관
○ 진부전통시장 주차타워 건립공사 설계용역 시행(착수)		`21. 7. 27. (`21. 10. 5.)	정연길 부군수 이정균 경제건설국장 김재봉 경제과장 김남호 경제정책팀장 임정학 주무관
○ 진부전통시장 주차타워 건립사업 주민설명회 개최(일자리경제과-7578호)		`22. 2. 14.	이정균 경제건설국장 김재봉 경제과장 김남호 경제정책팀장 이기언주무관
○ 진부전통시장 주차타워 건립사업 계획변경 검토 보고(일자리경제과-9470호)		`22. 2. 23.	한왕기 군수, 정연길 부군수 이정균 경제건설국장 김남호 경제정책팀장 이기언 주무관
○ 진부전통시장 주차타워 건립시설 설계용역에 따른 신기술·특허공법 선정 위원회 개최 (일자리경제과-20785호)		`22. 4. 25.	이정균 경제건설국장 김재봉 경제과장 김남호 경제정책팀장 이기언 주무관
○ 진부전통시장 주차타워 건립공사 안전보건대장 작성 용역 시행(일자리경제과-40829호)		`22. 8. 16.	김남섭 경제과장 문병덕 경제정책팀장 박유진 주무관.
○ 진부전통시장 주차타워 건축허가(신축) 신청 (일자리경제과-44840호)		`22. 9. 7.	김남섭 경제과장 문병덕 경제정책팀장 박유진 주무관
○ 진부전통시장 주차타워 건립사업 설계용역 준공		`22. 9. 8.	김남섭 경제과장 문병덕 경제정책팀장 박유진 주무관.
○ 진부전통시장 주차타워 건립공사 안전보건대장 적정성 확인 용역 시행		`22. 10. 26.	김남섭 경제과장 문병덕 경제정책팀장 박유진 주무관