1. 종합 스포츠타운 조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2006. 1월 ~ 2011. 5월

○ 총사업비 : 23,000백만원 (기금 3,000, 도비 2,900, 군비 17,100)

○ 사업규모 : 부지 40,395㎡, 건축면적 4,225㎡, 연면적 7480.99㎡,

체육시설(경기장) 면적 7,639.84㎡

○ 주요시설 : 체육센터, 인조잔디구장, 휴게 공간, 주차장 등

□ 사업진행 현황

○ 2003년도 공유재산관리계획 확정 : 2002. 9. 23

○ 상반기 지방재정투융자사업 도심사승인 : 2004. 5. 6

○ 평창종합스포츠타운 타당성조사용역완료 : 2004. 9. 13 ~ 12. 6

○ 평창군 공유재산관리계획 승인 : 2005. 3. 24

○ 도시계획시설결정고시(체육시설) : 2008. 10. 20

○ 도시계획실시인가(인허가 포함) : 2009. 3.13

○ 평창 스포츠타운 조성공사 착공 : 2009. 7. 22

○ 공정률 90% : 2010. 12

□ 기대효과

○ 종합운동장, 공설테니스장과 연계한 종합 스포츠타운을 조성함으로써       각종 체육대회 및 전지 훈련팀의 유치를 통하여 지역경제 활성화를       도모하고 공공체육 인프라 조성을 통한 지역 체육문화의 저변 확대에       기여

□ 전경사진

2. 방림농공단지 조성사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 평창군 방림면 방림리 613번지 일원

○ 총사업비 : 64억원(국13 도1 군50)

○ 사 업 량 : 조성면적(62,192㎡)

○ 사업기간 : 2007 ~ 2011년

□ 사업진행 현황

○ 방림농공단지 입지상담 및 타당성 검토 : ‘08. 04. 01

○ 토지보상계획 공고 : ‘09. 03. 06

○ 1·2차 문화재 발굴조사 완료 : ‘09. 12. 18

○ 농공단지 산업단지계획 지정 고시(군) : ‘10. 05. 03

○ 농공단지 조성공사 착공 : ‘10. 06. 29

○ 토지보상 : ‘09 ~ ’10. 12월 (29필지)

○ 2010. 12월까지 공정율 35%

□ 기대효과

○ 산업단지 기반조성으로 수도권 우량 기업유치 인프라 구축

○ 농촌지역 경제활성화 및 이전기업 공장용지 적기공급

○ 서울농생대 그린바이오 연구단지와 연계된 신소재 제조업 육성

○ 지역주민의 일자리 창출 및 생산기반 강화로 농외소득 증대 기여

□ 조감도 및 지구지역

3. 농촌마을종합개발사업(물구비권역)

□ 사업개요

○ 위    치 : 대화면 일원

○ 총사업비 : 74억원(국 52, 도 4, 군 13, 자부담 5)

○ 사 업 량 : 5개부문 19개사업

- 문화복지부문(5개) : 성황당정비, 쉼터조성, 등산로, 권역회관,

에너지체험시설

- 소득기반부문(5개) : 가공시설, 비가림재배, 특산품개발, 토종꿀육성,

약초․산채재배

- 농촌관광부문(1개) : 그린투어 체험장

- 경관시설부문(1개) : 권역경관 조성

- S/W운영부문(7개) : 브랜드개발, 품질개선, 정보화구축, 교육및견학,

홍보마케팅, 프로그램및축제개발, 주민조직활성화

○ 사업기간 : 2006년 ~ 2010년

□ 사업진행 현황

○ 예비타당성 조사 : 2005. 5. 23 ~ 7. 22

○ 농촌마을종합개발사업 기본계획 수립 실시 : 2005. 8. 29.

○ 마을개발협의회 : 2005. 11. 2.

○ 주민공청회 : 2006. 1. 12.

○ 기본계획 승인 : 2006. 8. 4.

○ ‘02~‘09까지 문화복지부문(5개), 농촌관광부문(1개), S/W운영부문(7개)

권역 농산물가공시설, 비가림 재배시설, 토종꿀육성 완료

□ 기대효과

○ 다원적 기능을 갖춘 쾌적하고 활력 넘치는 농산촌 건설

○ 농촌고유기능 활성화로 농촌의 농촌다움 회복

○ 농촌지역의 잠재된 인적, 물적자원의 활성화를 통한 농외소득 증대로

농촌주민의 자립기반 조성

□ 전경사진

4. 대관령 고원육상전지훈련장 조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2007. 01월 ~ 2012. 12월

○ 총사업비 : 8,500백만원(국비 2,500, 도비 1,330, 군비4,670)

- 부지매입비(별도) : 9,800백만원

○ 사업규모 : 부지 49,928㎡, 건축 연면적 1,759㎡, 체육시설(경기장) 면적 20,000㎡

○ 주요시설 : 축구장, 육상트랙, 체육관, 산책로, 휴게 공간, 주차장 등

□ 사업진행 현황

○ ‘06. 11 : 평창군공유재산관리계획 승인

○ ‘07. 04 : 지방재정투융자심사 완료 (강원도 조건부 : 국비 확보)

○ ‘09. 07 : 부지확보 완료

○ ‘10. 02 : 군관리계획 결정(변경) 완료

○ ‘10. 05 : 실시계획인가

○ ‘10. 06 : 공사착공

- 토목공사(사업부지 조성, 육상트랙 8레인, 주차장 아스콘포장)

- 운동장 보조기층 포설 및 다짐, 지상구조물 설치 완료

○ ‘10. 12 : 공정률 60%

□ 기대효과

○ 청정 고원 지역인 대관령에 육상 전지훈련장을 조성함으로써 각종        전지 훈련팀의 유치로 지역경제 활성화를 도모하고 육상 트랙과          주변 산책로 등의 이용을 통하여 지역 주민의 건강증진에 기여

□ 전경사진

5. 평창·대화 통합상수도 시설공사

□ 사업개요

○ 위    치 : 평창읍, 대화면 일원

○ 총사업비 : 400억원(국320, 도24, 군56)

○ 사 업 량 : 시설확장 9,200톤/일, 가압장 3개소, 배수지 1개소, 관로 34㎞

○ 사업기간 : 2010 ~ 2012

□ 사업진행 현황

○ 시설공사 착공 : 2010. 6.

○ 문화재 발굴용역 : 정수장부지 38,595㎡ 중 36,119㎡ 완료(공정 94%)

○ 공정율 : 30%

- 취수시설 집수매거(L=180m) 및 접합정(3개소) 완료

- 정수장 침전지 및 여과지, 가압장, 배수지 구조물 터파기 공사중

- 관로 34.0km 중 18.6km 완료

□ 기대효과

○ 평창․대화지역 및 농생대의 원활한 물공급

□ 전경사진

□ 계획평면도

6. 숲해설가(초급) 양성과정 운영

□ 사업개요

○ 총사업비 : 195.6백만원(국비75.6, 군비120)

○ 사 업 량 : 5기 150명(기수별 30명)

○ 사업기간 : ‘09. 10. 10 ~ ’12. 9. 22 (3년간)

□ 사업진행 현황

○ 숲해설가 (초급)양성과정 기관 인증 : 2009. 9. 23

○ 제1기 숲해설가 (초급)양성과정 운영

- 기 간 : ‘09. 10. 10. ~ ’10. 06. 12.

- 인 원 : 30명 수료

- 수료생 활동상황

· 비영리법인체 조직 후 관내 대형리조트(휘닉스파크, 한화․용평리조트)와    업무협약 후 숲해설 서비스 제공

· 관내 자연휴양림 및 산림욕장 등에서 숲해설가로 활동

○ 제2기 숲해설가 (초급)양성과정 운영 중

- 기 간 : ‘10. 06. 26. ~ ’11. 02. 27.

- 인 원 : 30명

□ 기대효과

○ 산림과 숲에 관한 전문지식을 갖춘 전문가 양성을 통해 녹색성장을 이끌어갈 지역인재 및 2018평창동계올림픽 유치도시를 이끌어갈 녹색인재 양성

□ 전경사진