[별지 6] 개별 투융자심사 사업의 추진현황

1. 서울대그린바이오첨단연구단지조성

부서명

기획감사실

담당자

전재준(☎330-2225)

□ 사업목적 및 필요성

○ 세계 최첨단의 그린바이오 연구단지 조성으로 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2006 - 2014(8년간)

○ 위 치 : 대화면 신리 706-1번지 일원

○ 규 모 : 부지 2,642㎡(건축 86,372㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 260,493백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기투자	‘13년도	‘14년도	‘15년도 이후
계	260,493	228,806	18,987	12,700	-
국 비	170,886	144,199	13,987	12,700	-
도 비	59,693	59,693	-	-	-
군 비	29,914	24,914	5,000	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 97%)

○ 서울대학교 평창캠퍼스 완공

□ 향후계획

○ 서울대 국제농업기술대학원 개원 : 2014년 9월(총정원 60명, 외국인 별도)

○ 산학협력단지준공후 전체 완공처리 :  2014. 10월 예정(사업비 127억원)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 당초사업비 : 229,000백만원/변경사업비 : 260,493백만원

2. 평창·대화 통합상수도 시설공사

부서명

상하수도사업소

담당자

박경균 (☎330-2441)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대화면에 서울농생대 그린바이오 첨단연구단지 입지에 따른 환경성 검토 협의 조건인 대화상수도 취수원이전과 단지 내 물 공급 및 평창읍을 비롯한 방림, 대화 지역주민 생활수준 향상과 각종 개발계획 등으로 상수도 사용량이 지속적으로 늘어나고 있어 원활한 용수공급과 환경부 지방상수도 통합운영에 맞추어 상수도를 효율적으로 운영하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010.  ~ 2014. 12

○ 위 치 : 평창군 평창․방림․대화면 일원

○ 규 모 : 취수시설 확장 9,900㎥/일, 정수장 신설 9,200㎥/일

배수지 2개소(신설1/2,000㎥/일, 개량1/738㎥/일 )

관로 L=34km, 가압장 4개소(라인가압장 1개소 포함) 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 40,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	40,000	30,691	5,010	4,299	0
국 비	32,000	23,500	4,500	4,000
시 도 비	2,400	1,762	339	299
시군구비	5,600	5,429	171

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 취수시설 확장 9,900㎥/일 완료

○ 정수장 신설 9,200㎥/일 완료

○ 정수시설 : 관리동, 침전지, 여과지, 송수펌프동, 약품투입동 완료

○ 배 수 지 : 신리배수지 신설완료, 대화배수지 개량완료

○ 관로시설 : L=34km 완료

□ 향후계획

○ 없음

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 : 당초 29,000백만원, 변경 40,000백만원

- 총사업비 변경승인(2011. 6. 13, 환경부)     - 실시설계 결과반영

3. 오대천생태하천복원사업

부서명

환경과

담당자

이용구(☎330-2331)

□ 필요성 및 기대효과

○ 오대천 생태하천 복원으로 수질개선 및 친수공간 조성

○ 비오점물질에 대한 저감과 생태복원을 통하여 오대천을 생태명소로           되살려, 동강, 남한강 등 하류수계 수질개선에 기여.

□ 사업개요

○ 기간 : 2009∼2015     ○ 위치 : 평창군 진부면 동산리 ~ 장전리

○ 사업규모 : L=33.2km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  16,800 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	16,800	3,607	5,822	6,654	717
국 비	12,262	1,963	4,119	5,678	502
시 도 비
시군구비	1,711	1,055	467	46	143
지 방 채
민간자본
기 타	2,827	589	1,236	930	72

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 56 %)

○ 2008. 08. 05 : 위·수탁 협약 체결 (평창군 ↔한국환경공단)

○ 2011. 04. 28 : 기본 및 실시설계 용역 준공

○ 2011. 12. 23 : 전체 및 1차공사 계약

○ 2012.01.06∼2012.08.27 : 1차공사 (여울 4개소 준공)

○ 2012.08.28∼2013.07.13 : 2차공사 (생태습지 일부공사 준공)

○ 2013.04.01∼2014.06.04 : 3차공사 (가동보, 어도 3개소, 징검여울 1개소)

□ 향후계획

○ 산책로, 생태습지, 친수공간 조성

4. 한강 역사, 문화적 근원지 복원사업

부서명

환경과

담당자

이일주(☎330-2362)

□ 필요성 및 기대효과

○ 한강의 시원지인 우통수에 대한 샘터 복원, 체험시설 설치 등을

통하여 시원지의 역사,문화적 가치를 새롭게 조명하고 “생명의 물

한강” 을 상징화 하고 탐방객들에게 새로운 체험거리 제공

□ 사업개요

○ 기간 : 2010∼2014        ○ 위치 : 평창군 진부면 동산리

○ 규모 : 연면적 980.24㎡ (오대샘터복원, 한강시원지체험관, 음수체험관)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,170백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	5,170	722	1,339	3,109
국 비	2,585	462	624	1,499
시 도 비	775.5	139	200	436.5
시군구비	1,809.5	121	515	1173.5
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60 %)

○ 사업기본계획 수립 : 2009. 3.

○ 기본설계 용역 완료 : 2010. 4. ~  9.

○ 5대샘터 복원 공사완료 : 2011. 5. 2 ~  10. 31

○ 한강 시원지 체험관 건축설계공모 및 설계 : 2011. 4.  ~ 2012. 6

○ 한강 시원지 체험관 전시분야 제안공모 및 설계 등 : 2011.11.8~2012.6.27

○ 한강 시원지 체험관 실시설계용역(건축) 계약심사 의뢰(강원도) ‘12. 8월

○ 한강 시원지 체험관 신축공사 발주(일반 6개, 감리 3개) : ‘13. 1~2월

□ 향후계획

○ 한강시원지 체험관 준공 : 2014. 8월경

5. 상수관망 선진화사업

부서명

상하수도사업소

담당자

박경균 (☎330-2441)

□ 사업목적 및 필요성

○ 최적관리시스템 구축에 다른 유수율 제고 및 생산원가 절감으로

지자체간 수도요금 및 서비스수준 격차 완화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010.  ~ 2016.

○ 위 치 : 평창군 지방상수도 5개소

○ 규 모 : 블록시스템구축 및 관망정비 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 38,297백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	38,297	19,951	8,361	5,990	3,995
국 비	19,149	10,837	3,319	2,995	1,998
시 도 비
시군구비	19,148	9,114	5,042	2,995	1,997
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 블록시스템구축 및 관망정비사업 계속 추진 중

□ 향후계획

○ 블록시스템구축 및 관망정비사업 계속 추진하여 2016년도 사업완료 시

목표 유수율 85% 달성

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 : 당초 27,940백만원, 변경 38,297백만원

- 총사업비 변경승인(2013. 6. 28, 환경부)

- 기본계획 결과반영

6. 대관령 전지훈련장 조성

부서명

경제체육과

담당자

김종율(☎330-2723)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대관령 고원 기후를 활용한 대관령 전지훈련장을 조성함으로써 각종

체육대회 및 전지훈련팀의 유치를 통하여 지역경제 활성화를 도모하고

공공체육 인프라 조성을 통한 지역 체육문화의 저변 확대에 기여

□ 사업개요

○ 기간 : 2006. 1월～2014. 9월

○ 위치 : 대관령면 횡계리 일원

○ 규모 : 부지 49,928㎡, 건축연면적 1,759㎡, 체육시설면적 20,000㎡

○ 시설내용 : 축구장 1면 7,140㎡(105×68m), 인조잔디구장 1면 7,140㎡

(105×68m), 트랙1식 400m(8레인), 트레이닝센터 1동 1,759㎡ 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	18,460	14,859	545	3,056
국 비	2,500	1,697	133	670
시 도 비	1,429	796	105	528
시군구비	14,531	12,366	307	1,858
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○ 실시설계용역 완료 및 계약심사 : 2010. 3

○ 토목공사 준공 : 2011. 5

○ 건축공사(트레이닝 센터 1동) 공정 진행중 : 준공예정일(2014. 9. 7.)

□ 향후계획

○ 건축공사 완료 후 부대토목공사 발주 후 연말까지 준공완료.

7. 황병산권역 권역단위종합정비

부서명

농축산과

담당자

권혁운  (☎330-1323)

□ 사업목적 및 필요성

○ 황병산권역의 농촌다움의 유지·보전과 쾌적한 농촌공간 조성

○ 지역주민의 ‘삶의 질’ 향상과 국토의 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011년~2015년(5년)

○ 위 치 : 대관령면 차항1,2리(법정리 1, 행정리 2)

○ 규 모 : 4개부문 10개사업(H·W 5개, S·W 5개)

- H·W: 대관령광장쉼터, 대관령식문화가공체험센터, 대관령안식처 등

- S·W: 교육 및 견학, 홍보·마케팅, 정보화구축, 컨설팅, 마을경영지원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,095백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	4,095	1,923	1,107	643	422
국 비	2,611	1,201	769	345	296
시 도 비
시군구비	1,119	515	330	148	126
지 방 채
민간자본	365	207	8	150
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

○ H·W(5개사업): 3개사업 완료, 2개사업 실시설계 완료

○ S·W(5개사업): 1단계(‘11~’13년) 사업 완료, 2단계(‘14~’15년) 추진 중

□ 향후계획

○ 2단계(‘14~’15년) 사업 ‘15년 12월 까지 완료

8. 2012 도암댐상류비점오염저감사업

부서명

환경과

담당자

이용운(☎330-2414)

□ 필요성 및 기대효과

○ 우기시 고랭지밭에서 유실되는 토사유출 방지

○ 비점오염 저감시설 조성을 통한 송천 및 도암댐 수질개선

□ 사업개요

○ 기간 : 2012년 ~ 2014년 ○ 위치 : 대관령면 용산리 일원

○ 사업규모 :  용산1리 일대 139필지 19,313㎡(비점오염 저감시설 설치)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	2,600	220	2,250	130
국 비	1,820	154	1575	91
시 도 비	117	10	101	6
시군구비	117	10	101	6
지 방 채
민간자본
기 타	546	46	473	27

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 99%)

○ 2011. 11. 28 : 투융자 심사

○ 2012.  7. 13 : 기본 및 실시설계 준공

○ 2013. 05. 22 : 공사중지(영농철)

○ 2013.10.01 : 공사착공

□ 향후계획

○ 2014.05 : 공사준공

9. 면온 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사

부서명

상하수도사업소

담당자

홍성군(☎330-2163)

□ 사업목적 및 필요성

○ 면온 공공하수처리장 증설 및 하수관거 확장공사를 통하여 봉평면 무이리 지역의 미처리 생활하수를 적정 처리 후 방류하여 2018 평창 동계올림픽 경기장 인근 면온천의 수질오염 방지로 깨끗한 수질보전 및 쾌적한 주거환경을 조성하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012년∼2015년

○ 위 치 : 강원도 평창군 봉평면 면온리, 무이리 일원

○ 규 모 : 공공하수처리장 증설 Q=820㎥/일(Q=480㎥/일⇒Q=1,300㎥/일)

: 하수관로 L=7,666m 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,939백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	10,939	426	470	7,149	2,894
국 비	7,657	298	182	5,151	2,026
시 도 비
시군구비	1,591.904	25.6	31.2	1,187.904	347.2
기타(기금)	1,690.096	102.4	256.8	810.096	520.8

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 기본 및 실시설계용역 완료 : 2011. 09. 05∼2013. 12. 19

○ 총사업비 변경 승인 : 2013. 12. 24 (원주지방환경청)

○ 하수처리공법 관련 민사소송 종결 : 2014. 06. 12 (평창군 승소)

○ 기술검토 및 재원협의 승인 : 2014. 07. 08 (강원도, 원주지방환경청)

○ 공사계약 원가심사 중 : 2014. 07. 14∼현재 (강원도)

□ 향후계획

○ 공사 일상감사 : 2014. 08월

○ 공사 발주 및 계약․착공 : 2014. 09월

○ 공사 완공 및 운영 : 2015. 12월

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 : 증설 Q=820㎥/일, 하수관로 L=9,400m⇒증설 Q=820㎥/일,

: 하수관로 L=7,666m (감 L=1,734m)

- 기본 및 실시설계 기술검토 및 재원협의 승인 : 2014. 07. 08 (강원도, 원주지방환경청)

○ 사업기간 : 2012년∼2014년⇒2012년∼2015년 (증 1년)

- 사업기간 변경 승인 : 2013. 12. 24 (원주지방환경청)

10. 봉평공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사

부서명

상하수도사업소

담당자

홍성군(☎330-2163)

□ 사업목적 및 필요성

○ 봉평 공공하수처리장 증설 및 하수관거 확장공사를 통하여 봉평면 흥정리 지역의 미처리 생활하수를 적정 처리 후 방류하여 흥정천의 수질오염 방지로 흥정계곡의 깨끗한 수질보전 및 쾌적한 주거환경을 조성하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012년∼2015년

○ 위 치 : 강원도 평창군 봉평면 창동리, 흥정리 일원

○ 규 모 : 공공하수처리장 증설 Q=200㎥/일(Q=1,000㎥/일⇒Q=1,200㎥/일)

: 하수관로 L=7,844m 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,248백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	8,248	287	1,686	4,875	1,400
국 비	5,773	201	1,112	3,480	980
시 도 비
시군구비	1,179	17	191	803	168
지 방 채
민간자본
기타(기금)	1,296	69	383	592	252

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 기본 및 실시설계용역 완료 : 2012. 04. 05∼2013. 06. 10

○ 기술검토 및 재원협의 승인 : 2013. 06. 20 (강원도, 원주지방환경청)

○ 공사 계약 : 2013. 09. 24

○ 공사 착공 : 2013. 09. 25

○ 총사업비 변경 승인 : 2013. 12. 24 (원주지방환경청)

□ 향후계획

○ 공사 완공 및 운영 : 2015. 12월

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 : 증설 Q=200㎥/일, 하수관로 L=10,700m⇒증설 Q=200㎥/일,

: 하수관로 L=7,844m (감 L=2,856m)

- 기본 및 실시설계 기술검토 및 재원협의 승인 : 2014. 6. 20 (강원도, 원주지방환경청)

○ 총사업비 : 7,389백만원⇒8,248백만원 (증 859백만원)

○ 사업기간 : 2012년∼2014년⇒2012년∼2015년 (증 1년)

- 총사업비 및 사업기간 변경 승인 : 2013. 12. 24 (원주지방환경청)

부서명

환경과

담당자

이용운(☎330-2414)

□ 필요성 및 기대효과

○ 우기시 고랭지밭에서 유실되는 토사유출 방지

○ 비점오염 저감시설 조성을 통한 송천 및 도암댐 수질개선

□ 사업개요

○ 기간 : 2013년 ~ 2014년

○ 위치 : 대관령면 용산리, 차항리 일원

○ 사업규모 : 대관령면 용산ㆍ수하리 300필지 50,000㎡(비점오염 저감시설 설치)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	7,400		2,200	5,200
국 비	5,180		1,540	3,640
시 도 비	333		99	234
시군구비	333		99	234
지 방 채
민간자본
기 타	1,554		462	1,092

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ ‘13. 2. 28 : 기본 및 실시설계 용역 사업수행능력평가

○ ‘13. 3. 27 : 기본 및 실시설계 착수

○ ‘13. 10. 25 : 공사착공

□ 향후계획

○ ‘14. 12. 30 : 공사완공

11. 2013 도암댐상류비점오염저감사업

12. 군도4호선(계촌3리)도로확포장공사

부서명

안전건설과

담당자

강석원 (☎330-2488)

□ 사업목적 및 필요성

○ 협소한 도로를 확포장하여 주민 통행불편은 물론 안전사고를 예방

□ 사업개요

○ 기 간 :  2013. 05. ∼ 2016. 12.

○ 위 치 : 평창군 방림면 계촌3리

○ 규 모 : 도로확포장 L=1.2㎞, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	2,200	-	500	700	1,000
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,200	-	500	700	1,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 21.6%)

○1 차분 : 도로확포장 L=260m 준공

□ 향후계획

○ 2014년이후 940m 도로확포장 예정

□ 사업변경 내역

○ 사업기간: 당초 2013. 5. ~ 2014. 12.

변경 2013. 5. ~ 2016. 12.

13. 원길1교 재가설 공사

부서명

건설방재과

담당자

어성용 (☎330-2484)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시특법상 안전등급 “D"급 교량이 원길1교를 재가설하여 교통사고 사전예방       과 주민통행 불안감 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 06. 07. ∼ 2014. 09. 01.

○ 위 치 : 평창군 봉평면 원길리

○ 규 모 : 교량 L=79m, B=10m, 접속도로 L=419m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,650백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	2,650	-	2,150	500	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,650	-	2,150	500	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  70%)

○ 교량 구조물시공완료

○ 접속도로 공사중

□ 향후계획

○ 2014년 08월말까지 준공예정

□ 사업변경 내역

구분	당 초	변 경
사 업 량	교량79m, 접속도로 419m	교량79m, 접속도로 419m
사 업 비	2,400백만원(군비)	2,650백만원(특교세:550, 군비:2,100)
사업기간	2013. 06.07. ~ 2014. 8월말	2013.6.07. ~ 2014. 09. 01.

14. 하안미(가평동) 농어촌마을하수도 개량공사

부서명

상하수도사업소

담당자

임재석(☎330-2448)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대화면 하안미(가평동)지역 기존 간이오수처리시설 전면개량 및 하수관로 설치로 하안미5리 지역에서 배출되는 미처리 생활하수를 적정 처리 후 방류하여 인근 하안미천의 수질오염 방지로 깨끗한 수질보전 및 쾌적한 주거환경을 조성하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년∼2015년

○ 위 치 : 강원도 평창군 대화면 하안미5리 일원

○ 규 모 : 소규모 공공하수처리장 신설 Q=30㎥/일

: 하수관로 L=3,350m 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,893백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	2,893		1,167	1,226	500
국 비	718		350	368
시 도 비
시군구비	1,288.404		326.8	461.604	500
기타(기금)	886.596		490.2	396.396

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 실시설계용역 완료 : 2010. 03. 31∼2013. 02. 22

○ 총사업비 변경 승인 : 2013. 12. 24 (원주지방환경청)

○ 편입토지 보상 완료(2필지, A=942㎡) : 2014. 01. 24

○ 기술검토 승인 : 2014. 06. 12 (강원도)

○ 재원협의 협의 중 : 2014. 07. 07∼현재 (원주지방환경청)

□ 향후계획

○ 재원협의 승인 : 2014. 08월

○ 공사 발주 및 계약․착공 : 2014. 09월

○ 공사 완공 및 운영 : 2015. 12월

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 : 신설 Q=30㎥/일, 하수관로 L=3,500m⇒신설 Q=30㎥/일,

: 하수관로 L=3,350m (감 L=150m) (실시설계 결과 반영)

○ 총사업비 : 2,393백만원⇒2,893백만원 (증 500백만원) (실시설계 결과 반영)

○ 사업기간 : 2013년∼2014년⇒2013년∼2015년 (증 1년)

- 사업기간 변경 승인 : 2013. 12. 24 (원주지방환경청)

15. 운교리 농어촌마을하수도 설치공사

부서명

상하수도사업소

담당자

임재석(☎330-2448)

□ 사업목적 및 필요성

○ 방림면 운교리 농어촌마을하수도 설치사업을 통하여 운교1리 지역의 기존 가옥 및 펜션에서 배출되는 생활하수를 적정 처리 후 방류하여 인근 계촌천의 수질오염 방지로 깨끗한 수질보전 및 쾌적한 주거환경을 조성하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년∼2015년

○ 위 치 : 강원도 평창군 방림면 운교1리 일원

○ 규 모 : 소규모 공공하수처리장 신설 Q=80㎥/일

: 하수관로 L=5,654m 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,047백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	4,047		514	1,538	1,995
국 비	2,833		300	1,076	1,457
시 도 비
시군구비	601		86	300	215
지 방 채
민간자본
기타(기금)	613		128	162	323

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 실시설계용역 : 2012. 11. 30∼2013. 12. 20 [(주)가온엔지니어링]

○ 하수도정비기본계획 부분변경 승인 : 2013. 07. 08 (강원도)

○ 사업기간 변경 승인 : 2013. 12. 24 (원주지방환경청)

○ 총사업비 변경 승인 요청 : 2014. 03. 17 (강원도, 원주지방환경청)

○ 기술검토 및 재원협의 승인 : 2014. 07. 07 (강원도, 원주지방환경청)

○ 공사 발주 : 2014. 08. 18

□ 향후계획

○ 총사업비 변경 승인 : 2014. 08월 (원주지방환경청)

○ 공사 계약 및 착공 : 2014. 08월

○ 공사 완공 및 운영 : 2015. 12월

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 : 신설 Q=60㎥/일, 하수관로 L=2,760m⇒신설 Q=80㎥/일 (증 Q=20㎥/일),

: 하수관로 L=5,654m (증 L=2,894m)

- 실시설계 기술검토 및 재원협의 승인 : 2014. 07. 07 (강원도, 원주지방환경청)

○ 총사업비 : 2,252백만원⇒4,047백만원 (증 1,795백만원)

- 실시설계 결과에 따른 총사업비 변경 승인 요청 : 2014. 03. 17 (강원도, 원주지방환경청)

○ 사업기간 : 2013년∼2014년⇒2013년∼2015년 (증 1년)

- 사업기간 변경 승인 : 2013. 12. 24 (원주지방환경청)

16. 평창군장애인복지관 신축공사

부서명

주민생활지원실

담당자

김남섭(☎330-2341)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현재의 장애인복지시설로는 다양하게 확대되고 있는 복지수요에 한계

○ 종합적 서비스기능을 갖춘 장애인 복지회관 건립 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 7월 ~ 2016. 12월

○ 위 치 : 평창군 진부면 상진부리 245-23

○ 규 모 : 연면적 1,894㎡(지하1층, 지상3층), 건축면적 : 646㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원                                 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	4,000		112	910	2,978
국 비	1,500		112		1,388
시 도 비	500				500
시군구비	1,000			910	90
기 타	1,000				1,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 후보지타당성 조사용역 : 2012. 8. 6 ~ 2012. 10. 31

○ 지방재정 투·융자 심사 (평창군 자체) : 2013. 3. 21 적정 승인

○ 최종 후보지 결정 : 2013. 3. 28 (평창군장애인복지관건립자문회의)

○ 공유재산관리계획 승인 및 기본계획안 확정 : 2013. 4. 26.

○ 실시설계용역 : 2013. 7. 15. ~ 11. 14.

□ 향후계획

○ 공사계약 및 착공 : 2014. 7월말

○ 국·도비 확보 노력으로 군비부담 해소

- 보건복지부, 문화관광체육부, 강원도청 방문 : 수시

※ 지방이양사업(분권교부세)으로 국비확보 어려움

17. 월정사 전시관 건립공사

부서명

문화관광과

담당자

황재국(☎330-2714)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현재 월정사 성보박물관의 취약한 문화재보관 및 관리환경 개선

○ 2018동계올림픽 대비 지역 문화 자원가치제고 인프라구축

□ 사업개요

○ 기 간 :  2011년~2015년 (5년)

○ 위 치 : 평창군 진부면 동산리 17-5

○ 규 모 : 부지 16,270㎡, 건축면적 2,706㎡, 연면적 6,266㎡,

지하2층/지상2층 전시관 1동, 지상1층 강당 1동, 부속회랑 1동

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  18,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	1,800	2,244.5	3,955.5	5,800	6,000
국 비	5,378	1,200	1,200	1,178	1,800
시 도 비	6,311	540	1,860	1,811	2,100
시군구비	6,311	504.5	895.5	2,811	2,100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 월정사 전시관 건립공사 착공 : 2012. 12. 20

○ 추진단계 : 전시관 골조공사 완료 및 내외부 미장공사 진행 중

□ 향후계획

○2015.12월 공사준공 및 전시관 개관

18. 전통민속 상설공연장 건립

부서명

문화관광과

담당자

황재국(☎330-2714)

□ 사업목적 및 필요성

○ 둔전평농악을 중심으로 지역 전통민속 전승보전 인프라 구축과 2018동계       올림픽의 문화올림픽 실현 중심시설로 활용

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년~2016년 (4년)

○ 위 치 : 평창군 용평면 장평리 380-2

○ 규 모 : 공연장(지상3층 1동 연면적 1,584㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	4,500	0	121	1,000	3,379
국 비	1,800		48.4	400	1,351.6
시 도 비	540		14.52	120	405.48
시군구비	2,160		58.08	480	1,621.92
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 공유재산관리계획 승인(대체부지) : 2013. 06. 25

○ 사업관련용역(4건) 추진 : 2013. 07. 01 ~ 2014. 04. 25

○ 지구단위계획 변경용역 등 관련 용역 일시중지 : 2014. 01. 07

- 주민의견 수렴에 따른 계획(안) 확정 지연

○ 대체부지(축협) 소유권이전 및 보상금 지급 : 2014. 02. 12

□ 향후계획

○ 사업부지 조기 확정 후 본격적인 공사추진(경제체육과, 용평면 협조)

19. 마하생태관광모델 조성사업

부서명

문화관광과

담당자

정진선(☎330-2751)

□ 사업목적 및 필요성

○백룡동굴, 민물고기생태관, 동강을 연계한 생태관광을 벨트화하여 자연

환경을 최대한 보전하고 생태녹색관광지로 조성하여 생태체험프로그램

운영으로 지역경제 활성화에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010~2014(5년간)

○ 위 치 : 평창군 미탄면 마하리 일원

○ 규 모 :  3,397,921㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :2,160백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	2,160	1,240	400	520
국 비	1,080	620	200	260
시 도 비
시군구비	1,080	620	200	260
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 기반시설 구축

○ 주민 역량교육 및 생태체험프로그램 운영

○ 홍보 마케팅( 국제관광홍보전, 거리홍보전, 팸투어, 온라인 오프라인 광고)

○ 생태체험축제 지원

□ 향후계획

○ 생태관광 홍보 및 프로그램 운영

20. 평창동계올림픽 급수체계구축

부서명

상하수도사업소

담당자

박경균(☎330-2441)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2018 평창동계올림픽 개최 및 지역개발 수요증가로 상수도 수요량이 급

증하고 있으나 현재 운영중인 대관령상수도 취수량 부족으로 대체수원

개발이 시급하여,

◦ 대관령 식수전용 저수지 개발 및 상수도시설 확충으로 용수부족을 해결

하고 개발수요에 능동적으로 대처하여 성공적인 올림픽을 개최

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2016

○ 위 치 : 평창군 대관령면 일원

○ 규 모 : 대관령 식수전용저수지- 총저수량 194만톤(유효 159만톤)

상수도시설 확충 - 정수장 Q=7,000㎥/일, 관로 L=17.6km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 60,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	60,000	1,920	5,000	10,000	43,080
국 비	36,000	-	3,000	6,000	27,000
시 도 비	12,000	-	1,000	2,000	9,000
시군구비	12,000	1,920	1,000	2,000	7,080
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2014. 2   : 기본 및 실시설계 완료

○ 2014. 5 ~ : 각종 인허가 협의 및 행정절차 이행중

□ 향후계획

○ 2014. 8. : 수도사업인가 및 공사계약 및 착공

○ 2014. 8 ~ 2016. 12 : 공사추진 및 완료

21. 평창101호(유동~약수간)농어촌도로확포장공사

부서명

안전건설과

담당자

강석원 (☎330-2488)

□ 사업목적 및 필요성

○ 협소한 도로를 확포장하여 주민 통행불편은 물론 안전사고를 예방

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 06. 21. ~ 2014. 6. 23.

○ 위 치 : 평창군 평창읍 유동리일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=0.8㎞, 국도접속부포장 L=246m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	2,400	800	1,200	400	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,400	800	1,200	400	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 도로확포장 L=0.8㎞포장완료

○ 국도 접속도로 공사중

□ 향후계획

○ 2014. 6월 준공예정

□ 사업변경 내역

구분	당 초	변 경
사 업 량	도로확포장L=0.8㎞, 국도포장194m	도로확포장L=0.8㎞, 국도포장246m
사 업 비	2,200백만원	2,400백만원
사업기간	2013.6.21. ~ 2014. 6. 23.	2013.6.21. ~ 2014. 6. 23.

22. 평창군유기성폐기물에너지화시설지역 발전기금 지원사업

부서명

환경과

담당자

주정희(☎330-2336)

□ 사업목적 및 필요성

○ 평창군 유기성폐기물 에너지화 시설과 관련,  주민 요구 사항인 지역 발전기금을 지원하여 행정 정책에 대한 신뢰구축과 주변지역 지원사업이 원활히 추진되도록 함.

□ 사업개요

○ 기    간 : 2011. 7월 ~ 2015. 2월 (지식경제부 국책과제 수행)

○ 위    치 : 평창군 진부면 하진부리 350번지 일원 (진부하수처리장 인근)

○ 사업규모 : 30톤/일(유기성폐기물 에너지화)

○ 부지면적 : 4,883㎡ (약 1,480평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 2013년 지역발전기금 지원 : 20억

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	2,000		2,000
국 비
시 도 비
시군구비	2,000		2,000
지 방 채
민간자본
기 타

(단위 : 백만원)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  60%)

○ 2013년 3월 : 지역발전기금 집행계획수립

○ 2013년 5월 : 지역발전기금 교부결정

○ 2014년 3월 : 2013년도 정산 및 2014년 사업계획검토

□ 향후계획

○ 이자발생 등 사업비 예상액 : 56,394,244원

○ 2014년 1월∼12월: 지역환원사업(50%), 공공운영사업(30%),

지역장학사업(20%) 지원예정