[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

상하수도사업소/상수도

②담당자

(전화번호)

민선기(시설7급)

(330-2441)

③정책사업명

평창동계올림픽 급수체계 구축사업

④선정기준

30억이상 예산 건설사업

⑤사업기간

2010년~2017년

⑥주요내용

□ 추진배경

○ 2018 동계올림픽 유치대비와 진부면민과의 약속이행, 지역개발 수요      에 따른 수돗물 수요량이 급증하고 있으나, 현재 운영하고 있는 대관      령상수도취수량이 부족하여 용수해결을 위한 대체수원 개발

□ 사업개요

○ 위    치 : 평창군 대관령면 일대

○ 사 업 량

[식수전용저수지]

- 제당(L=163m, H=40m), 총저수량194.19만톤(유효저수량 158.67만톤)

- 여수토 L=100m, 방수로(L=260m), 복통(표준마제형 2R=4.0m)

L=227m

- 취수탑 H=29m(D=5m), 취수공(D=0.4m) 5공

- 도로 L=2.54km(B=5.0m),기초처리 270공(제당 149공, 여수토 121공)

- 조경 : 수변공원 1식, 제당사면부 1식, 전망대조성 1식

- 수질오염방지시설 사방댐 1개소(H=5.5m), 인공식물섬 A=2,000㎡

- 풍력선로이설 : 기존선로 2조 철거 L=2.9km, 시설 L=3.6km

[상수도시설 확충]

- 정수장 Q=7,000㎥/일 ․송수가압장 Q=5,430㎥/일(H=60.0m)

- 관로 L=17.6km

· 도수관로(D=350) L=3.7km, 송수관로(D=500~D150) L=13.9km

○ 총사업비 : 60,000백만원(국비 360, 도비 120, 군비 120)

구 분		합 계	예산확보계획(백만원)
			2012까지	2013년	2014년	2015년	2016년
합 계		60,000	1,920	5,000	10,000	13,500	29,580
환특회계	국비	36,000	-	3,000	6,000	8,100	18,900
	도비	12,000	-	1,000	2,000	2,700	6,300
	군비	12,000	1,920	1,000	2,000	2,700	4,380

□ 추진상황

○ 수도정비기본계획(환경부) 승인: 2009. 9.

○ 수도정비 기본계획 변경(한강유역환경청) 승인: 2012. 10. 12.

○ 급수체계구축 실시설계용역 완료 : 2014. 12. 26.

- 대관령 식수전용저수지, 상수도시설 확충(2014. 5. 공사설계완료)

○ 급수체계구축사업 위․수탁협약(계약) 추진

- 위․수탁협약 추진계획(안) : 2014. 1. 28.

- 위․수탁 계약(한국환경공단) 통보 : 2014. 2. 11.

- 위․수탁 협약기간 : 2014. 3. 1. ~ 2016. 12. 31.

⇒ 위․수탁 협약내용 변경 추진(필요) : 수탁기간 및 사업비 등 확정

○ 정수장 신설부지 교환추진(한일산업 주식회사) : 2014. 7월완료

○ 설계VE 실시(한국환경공단) : 2014. 7. 8.완료

○ 강원도건설기술심의 완료 : 2014. 9. 12.

○ 비상대처계획(EAP)수립 : 2014. 7. 22.

○ 사전재해영향성검토 협의 : 2015. 8. 12.

○「특별법」에 따른 사업시행자(평창군수) 지정 : ‘14. 09. 18.

○ 지방도456호선 공사중첩구간(L=2.1km) 공사추진 : ‘14. 10. 06.

○ 상수도시설확충공사 계약업체 선정 및 공사 추진 : ‘14. 12. 5.

○ 식수전용저수지 계약업체 선정 및 공사 추진 : ‘14. 12. 8.

○「특별법」 제31조 및 동법시행령 제18조에 따른 시행자

사업계획승인신청(평창군⇒강원도⇒ 협의기관) : ‘14. 12. 17.

○ 수도사업인가( 강원도 ⇒ 평창군) : 2015. 3. 20.

□ 향후계획

○ 2015. 3월 ∼ 6월 : 공사 관련 각종 인·허가 협의 및 승인

○ 2017. 6월 ~ 8월 : 시운전    ○ 2017. 10월 : 준 공