[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	상하수도사업소/하수도	②담당자 (전화번호)	홍성군(시설7급) (330-2163)
③정책사업명	동계올림픽 하수도시설 확충사업
④선정기준	30억이상 예산 건설사업	⑤사업기간	2014년~2017년
⑥주요내용	□ 추진배경 ○ 2018 평창 동계올림픽 대회관련시설과 방문 관람객 및 주변특구지역 개발 등으로 증가되는 하수량에 대비하여 공공하수도시설 확충사업 을 추진 ○ 성공적인 환경올림픽 개최와 지역사회의 건전한 발전, 공중위생의 향상 및 공공수역의 수질보전에 기여 □ 사업개요 ○ 위 치 : 평창군 대관령면, 진부면 일원 ○ 사 업 량 - 진부 공공하수처리장 증설 Q=900㎥/일(Q=4,100㎥/일⇒Q=5,000㎥/일) - 진부 총인처리시설 증설 Q=900㎥/일(Q=4,100㎥/일⇒Q=5,000㎥/일) - 대관령 공공하수처리장 하수저류시설 신설 Q=2,000㎥/일 - 대관령 총인처리시설 신설 Q=5,000㎥/일 - 하수관로 L=15.519km(진부 L=8.145km, 대관령 L=7.374km) ○ 총사업비 : 23,211백만원 (국비 16,248, 기금 4,178, 지방비 2,785) □ 추진상황 ○ 기본 및 실시설계 완료 : 2012. 6. 27.∼2013. 12. 18. [(주)이산외 1개사] - 2014년 제1차 지방재정 투·융자사업 중앙심사 승인 : 2014. 3. 24. - 평창군 하수도정비기본계획 전체변경(안) 승인 : 2014. 7. 25. - 하수처리공법(총인처리시설 포함) 선정 완료 : 2014. 10. 14. - 기본 및 실시설계 기술검토, 재원협의 신청 : 2015. 2. 5. - 도로점용(굴착)허가, 실시계획(변경)인가 등 인·허가 추진 : 2015. 1월∼현재 □ 향후계획 ○ 기본 및 실시설계 기술검토, 재원협의 승인 : 2015. 4월 ○ 공사 관련 각종 인·허가 협의 및 승인 : 2015. 1월∼5월 ○ 건설사업관리용역 발주 및 계약·착수 : 2015. 5월 ○ 공사 발주 및 계약·착공 : 2015. 5월∼6월 ○ 종합시운전 : 2016. 3월∼6월 ○ 공사준공예정 : 2016. 12월