[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

안전건설과/도로

②담당자

(전화번호)

시설7급 김복기

(330-2484)

③정책사업명

2018평창동계올림픽 경기장 진입도로 정비사업

④선정기준

30억 이상 예산 건설사업

⑤사업기간

2015.1~2017.12

(전년도 누락사업)

⑥주요내용

□ 사업목적

□2018평창동계올림픽 기반시설 확충사업으로 성공적인 동계     올림픽개최와 지역경제 활성화 도모, 통행편의 제공

□ 사업계획

구 분	사업개요	총 사업비(백만원)				시행청	공정율
		계	국고	도비	군비		‘16계획	실적
계	6개노선	169,608	118,726	25,441	25,441
군도12호(유천~수하)	L=1.75km(4차로)	23,473	16,431	3,521	3,521	군	85	39
군도13호(싸리재~용산)	L=4.15km(4차로)	51,916	36,341	7,788	7,787	강개공	80	30
대관령205호(용산~수하)	L=2.7km(4차로)	33,488	23,442	5,023	5,023	군	90	38
대관령209호(수하~횡계7)	L=1.34km(3차로)	15,158	10,611	2,274	2,273	군	95	55
군도12호(유천~용산)	L=2.92km(2차로)	14,924	10,447	2,238	2,239	군	70	2
진부IC~호명교	L=2.2km(4차로)	30,649	21,454	4,597	4,598	군	60	-

□ 추진상황

□기존 4개노선 : 토공, 배수공, 구조물공(터널,교량) 등 추진중

□신규 2개노선 : 군도12호 2월 착공, 진부IC~호명교 5월 착공

□ 향후계획

□기존 4개노선 : 2016년 기층포장, 2017년 6월 전체사업 준공

□신규 2개노선 : 2016년 토공, 구조물공, 2017년 12월 전체사업 준공