평창군 고시 제2014-54호

평창군 진부면소재지

종합정비사업 H/W사업 시행계획 고시

진부면소재지 종합정비사업 H/W사업 시행계획 승인사항을 농어촌정비법시행령제82조 규정에 의거 아래와 같이 고시합니다.

2014년  6월  13일

평   창   군   수

1. 고시 내용 : 아래와 같음.

2. 관계서류 및 도서는 평창군청 도시주택과(☏ 033-330-2418) 및 진부면

사무소 건설담당(☏ 033-330-2677)에 비치하여 일반인에게 보입니다.

3. 사업시행자 : 평창군(일괄위탁 : 한국농어촌공사 원주지사)

평창군 진부면소재지 종합정비사업

1. 사업개요

○ 위    치 : 강원도 평창군 진부면 하진부리 일원(상진부리, 송정리)

○ 사업기간 : 2013 ~ 2016년(4년간)

○ 주요사업내용

- 기초생활기반확충 : 스쿨존 및 학교가는길 조성, 문화복지센터

재래시장 공용주차장조성

- 지역경관개선 : 진입관문 및 랜드마크 조성, 진입로 가로경관정비

○ 소요사업비 : 7,000백만원(국비: 4,900, 지방비: 2,100)

2. 추진경위

2013. 03. 12 : 기본계획 착수

2013. 04. 03 : 진부면 소재지 주민 설명회 개최

2013. 08. 29 : 진부면 소재지 최종 보고회

2013. 10. 04 : 진부면 지역역량강화사업 승인

2013. 12. 31 : 진부면소재지 기본계획 승인

2014. 03. 01 : 경관형성계획 및 실시설계 착수

3. 연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	연차별 사업비 투자내역					비 고
	합 계	2013년	2014년	2015년	2016년
합 계	<17> 7,000	956	1,511	1,511	<17> 3,022	<>:외서: 자부담
◦ 국 비	4,900	669	1,058	1,058	2.115
◦ 지방비	2,100	287	453	453	907
◦ 민간부담	<17>				<17>

4. 기본계획 승인내역 (‘13.12.31)

(단위 : 백만원)

구 분	사업명	사 업 내 용	사업비(백만원)	비 고
		기본계획	기본계획
합 계			7,000
기초 생활 기반 확충	생활 기반	□ 스쿨존 및 학교가는 길 조성 대상지(a)-100m, 대상지(b)-100m대상지(c)- L=225.0m, B=8.0m	699
		□ 진부문화복지센터 (1,390㎡ 3층, 주차장조성:150㎡, 교류광장:731㎡)	2,500
		□ 재래시장 공용주차장(503㎡, 3층 철골구조)	1,341
지역 경관 개선	경관	□ 진입관문 및 랜드마크 조성 (조형물 설치 및 공원조성(653㎡))	354
		□ 진입로 가로경관정비 (가로수길 조성 및 화단조성)	789
지역 역량 강화	교육	□ 리더교육, 주민교육, 선진지견학(국내,국외)	176	2013.10.04 선승인
	컨설팅 홍보 정보화	□ 권역활성화컨설팅, 체험프로그램개발, 리플릿제작, 축제지원, 브랜드개발, 홈페이지구축 및 운영, 정보화기기	119
	경영 지원	□ 추진위원회 지원, 전문가자문	24
	부대 비용	□ 설계비등 제경비	998

5-1. 시행계획 승인 내역

가. 사 업 량

사 업 명	기본계획	기승인	금회시행계획	비 고
합 계	6개사업	1개사업	1개사업
① 스쿨존 및 학교가는 길 조성	1		1	대상지(C) 부분 선시행
② 문화복지센터	1
③ 재래시장 공용주차장조성	1
④ 진입관문 및 랜드마크조성	1
⑤ 진입로 가로경관정비	1
⑥ 지역역량강화	1	1

나. 사 업 비

(단위 : 천원)

사 업 명	기본계획 (A)	기승인	금회시행계획 (B)	증△감	비 고
합 계	7,000,000	318,680	332,539	△6,348,781
① 스쿨존 및 학교가는 길 조성	699,000		332,539	△366,461	대상지(C) 부분 선시행
② 문화복지센터	2,500,000		-	△2,500,000
③ 재래시장 공용주차장조성	1,341,000		-	△1,341,000
④ 진입관문 및 랜드마크조성	354,000		-	△354,000
⑤ 진입로 가로경관정비	789,000		-	△789,000
⑥ 지역역량강화	318,680	318,680	-
⑦ 제경비	998,320		-	△998,320

5-2. 시행계획 승인 내역

(수입)

(단위 : 천원)

구 분	기본계획	시행계획				비고
		합 계	기승인	금회승인	향후계획
합 계	7,000,000	7,000,000	318,680	332,539	6,348,781
◦ 국 비	4,900,000	4,900,000	223,076	233,777	-
◦ 지방비	2,100,000	2,100,000	95,604	98,762	-
- 군 비	2,100,000	2,100,000	95,604	98,762	-

(지출)

(단위 : 천원)

구 분		기본계획	시행계획				비고
			합 계	기승인	금회승인	향후계획
합 계		<16,800> 7,000,000	<16,800> 7,000,000	318,680	332,539	6,348,781	<>:외서: 자부담
H/W 사업	스쿨존 및 학교가는길 조성	699,000	699,000		332,539	366,461
	문화복지센터 조성	2,500,000	2,500,000		-	2 ,500,000
	재래시장 공용주차장 조성	1,341,000	1,341,000		-	1,341,000
	진입관문 및 랜드마크 조성	354,000	354,000		-	354,000
	진입로 가로경관정비	789,000	789,000		-	789,000
S/W 사업	지역역량강화	<16,800> 319,000	<16,800> 318,680	318,680	-
기타	제경비	998,000	998,320		-	998,320