평창군 고시 제2015-36호

평창군 진부면소재지

종합정비사업 H/W사업 시행계획 고시

진부면소재지 종합정비사업 H/W사업 시행계획 승인사항을 농어촌정비법시행령제82조 규정에 의거 아래와 같이 고시합니다.

2015년  4월  10일

평   창   군   수

1. 고시 내용 : 붙임과 같음

2. 관계서류 및 도서는 평창군청 도시주택과(☏ 033-330-2418) 및 진부면

사무소 건설담당(☏ 033-330-2677)에 비치하여 일반인에게 보입니다.

3. 사업시행자 : 평창군(일괄위탁 : 한국농어촌공사 원주지사)

진부면 소재지 종합정비사업 시행계획서

1. 사업개요

○ 위    치 : 강원도 평창군 진부면 하진부리 일원(상진부리, 송정리)

○ 사업기간 : 2013 ~ 2016년(4년간)

○ 주요사업내용

- 기초생활기반확충 : 스쿨존 및 학교가는길 조성, 문화복지센터

재래시장 공용주차장조성

- 지역경관개선 : 진입관문 및 랜드마크 조성, 진입로 가로경관정비

○ 소요사업비 : 7,000백만원(국비: 4,900, 지방비: 2,100)

2. 추진경위

2013. 03. 12 : 기본계획 착수

2013. 08. 29 : 진부면 소재지 최종 보고회

2013. 10. 04 : 지역역량강화사업 승인

2013. 12. 31 : 기본계획 승인(강원도)

2014. 04. 01 : 경관형성계획 및 세부설계 용역 실시

2014. 06. 12 : 학교가는길 대상지(C) 시행계획(일부) 승인

2014. 07. 14 : 학교가는길 대상지(C) 조성공사 착공

2014. 04. 01 : 경관형성계획 및 세부설계 용역 실시

2014. 09. 22 : 경관형성계획 및 세부설계 중간보고회 개최

2014. 11. 04 : 경관형성계획 및 세부설계 최종보고회 개최

2015. 02. 20 : 경관형성계획 및 세부설계 완료(조형물 제외)

3. 연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	연차별 사업비 투자내역					비 고
	합 계	2013년	2014년	2015년	2016년
합 계	<17> 7,000	956	1,511	2,256	<17> 2,277	<>:외서: 자부담
◦ 국 비	4,900	669	1,058	1,579	1.594
◦ 지방비	2,100	287	453	677	683
◦ 민간부담	<17>				<17>

4. 기본계획 승인내역 (‘13.12.31)

(단위 : 백만원)

구 분	사업명	사 업 내 용	사업비(백만원)	비 고
		기본계획	기본계획
합 계			7,000
기초 생활 기반 확충	생활 기반	□ 스쿨존 및 학교가는 길 조성 대상지(a)-100m, 대상지(b)-100m, 대상지(c)- L=225.0m, B=8.0m	699
		□ 진부문화복지센터 (1,390㎡ 3층, 주차장조성:150㎡, 교류광장:731㎡)	2,500
		□ 재래시장 공용주차장(503㎡, 3층 철골구조)	1,341
지역 경관 개선	경관	□ 진입관문 및 랜드마크 조성 (조형물 설치 및 공원조성(653㎡))	354
		□ 진입로 가로경관정비 (가로수길 조성 및 화단조성)	789
지역 역량 강화	교육	□ 리더교육, 주민교육, 선진지견학(국내,국외)	176	2013.10.04 선승인
	컨설팅 홍보 정보화	□ 권역활성화컨설팅, 체험프로그램개발, 리플릿제작, 축제지원, 브랜드개발, 홈페이지구축 및 운영, 정보화기기	119
	경영 지원	□ 추진위원회 지원, 전문가자문	24
	부대 비용	□ 설계비등 제경비	998

5. 시행계획 승인내역

(단위 : 백만원)

구 분	사업명	사 업 내 용	사업비(백만원)				비 고
		시행계획	소계	기승인	금회	추후
합 계			7,000	652	5,569	779
기초 생활 기반 확충	생활 기반	□ 진부초등학교 앞 - L=225.0m,B=8.0m □ 진부중·고등학교 앞 - L=16.0m, A=294㎡	623	333	290	-	기승인 333백만원
		□ 진부문화복지센터 (1,334.2㎡ 2층) 1F–다목적실(667.1㎡) 2F–강당,사무실(667.1㎡))	2,942	-	2,942	-
		□ 재래시장 공용주차장 (지상주차장 2개소) (1) : 988㎡, 24대, (2) : 941㎡, 23대	1,086	-	1,086	-
지역 경관 개선	경관	□ 진입관문 및 랜드마크 조성 (조형물 설치:250㎡)	779	-	-	779	향후추진
		□ 진입로 가로경관정비 (가로수, 보도블럭 교체)	252	-	252	-
지역 역량 강화	교육	□ 리더교육, 주민교육, 선진지견학(국내,국외)	176	176	-	-	2013.10.04 기승인
	컨설팅 홍보 정보화	□ 권역활성화컨설팅, 체험프로그램개발,리플릿제작,축제지원, 브랜드개발, 홈페이지구축 및 운영, 정보화기기	119	119	-	-
	경영 지원	□ 추진위원회 지원,전문가자문	24	24	-	-
	부대 비용	□ 설계비등 제경비	999		999

5-1. 기본계획/시행계획 대비표

(단위 : 백만원)

구 분	사업명	사 업 내 용		사업비(백만원)		비 고
		기본계획	시행계획	기본계획	시행계획
합 계				7,000	7,000
기초 생활 기반 확충	생활 기반	□ 스쿨존 및 학교가는 길 조성 대상지(a)-100m 대상지(b)-100m 대상지(c)- L=225.0m, B=8.0m	□ 진부초등학교 앞 - L=225.0m,B=8.0m □ 진부중·고등학교 앞 - L=16.0m, A=294㎡	699	623	대상지(C) 선승인 333백만원
		□ 진부문화복지센터 (1,390㎡ 3층, 주차장조성:150㎡, 교류광장:731㎡)	□ 진부문화복지센터 (1,334.2㎡ 2층, 1F–다목적실(667.1㎡) 2F–강당,사무실(667.1㎡))	2,500	2,942
		□ 재래시장 공용주차장 (503㎡, 3층 철골구조)	□ 재래시장 공용주차장 (지상주차장 2개소, (1) : 988㎡, 24대, (2) : 941㎡, 23대	1,341	1,086
지역 경관 개선	경관	□ 진입관문 및 랜드마크 조성 (조형물 설치 및 공원조성(653㎡))	□ 진입관문 및 랜드마크 조성 (조형물 설치:250㎡)	354	779	향후추진
		□ 진입로 가로경관정비 (가로수길 조성 및 화단조성)	□ 진입로 가로경관정비 (가로수, 보도블럭 교체)	789	252
지역 역량 강화	교육	□ 리더교육, 주민교육, 선진지견학(국내,국외)	□ 리더교육, 주민교육, 선진지견학(국내,국외)	176	176	2013.10.04 선승인
	컨설팅 홍보 정보화	□ 권역활성화컨설팅, 체험프로그램개발,리플릿제작,축제지원, 브랜드개발, 홈페이지구축 및 운영, 정보화기기	□ 권역활성화컨설팅, 체험프로그램개발,리플릿제작,축제지원, 브랜드개발, 홈페이지구축 및 운영, 정보화기기	119	119
	경영 지원	□ 추진위원회 지원,전문가자문	□ 추진위원회 지원,전문가자문	24	24
	부대 비용	□ 설계비등 제경비	□ 설계비등 제경비	998	999

5-2. 시행계획 승인 내역

가. 사 업 량

사 업 명	기본계획	기승인	금회시행계획	비 고
합 계	6개사업	1개사업	4개사업	1개사업 향후시행
① 스쿨존 및 학교가는 길 조성	1		1	초등학교 부분 선시행
② 문화복지센터	1		1
③ 재래시장 공용주차장조성	1		1
④ 진입관문 및 랜드마크조성	1		-	향후계획
⑤ 진입로 가로경관정비	1		1
⑥ 지역역량강화	1	1

나. 사 업 비

(단위 : 천원)

사 업 명	기본계획 (A)	기승인	금회시행계획 (B)	증△감	비 고
합 계	7,000,000	651,219	5,569,937	△778,844
① 스쿨존 및 학교가는 길 조성	699,000	332,539	289,773	△76,688	초등학교앞 부분 선시행
② 문화복지센터	2,500,000		2,942,328	442,328
③ 재래시장 공용주차장조성	1,341,000		1,086,605	△254,395
④ 진입관문 및 랜드마크조성	354,000		-	△354,000	향후계획 (사업비 : 778,844)
⑤ 진입로 가로경관정비	789,000		252,450	△536,550
⑥ 지역역량강화	318,680	318,680	-	-	2013.10.04 선승인
⑦ 제경비	998,320		998,781	461

6. 세부사업계획

사 업 명	기본계획	금회시행계획	비고
계	6개사업	4개사업
스쿨존 및 학교가는길 조성	◦ 사업비 : 234 백만원(중고등학교 앞) ◦ 위 치 : 진부중·고등학교 앞 길 ◦ 사업량 - 도로 L=200.0m	◦ 사업비 : 289 백만원 ◦ 위 치 : 진부중·고등학교 앞 ◦ 사업량 - 보도 L=16.0m, 주차장:294㎡,7대
	◦ 사업비 : 465 백만원(초등학교 앞) ◦ 위 치 : 진부초등학교 앞 205-7번지 일원 ◦ 사업량 - 도로 L=225.0m, B=8.0m	◦ 사업비 : 333백만원(대상지C) ◦ 위 치 : 진부초등학교 앞 205-7번지 일원 ◦ 사업량 - 진부초등학교 앞 학굣길 조성 - 도로 L=225.0m, B=8.0m	대상지(c)부분시행
문화복지 센터	◦ 사업비 : 2,500 백만원 ◦ 위 치 : 하진부리1289-46체 일대 ◦ 사업량 - 문화복지센터 3층(1,390㎡) - 주차장 조성(150㎡), 교류광장(731㎡)	◦ 사업비 : 2,942 백만원 ◦ 위 치 : 하진부리1289-59체 ◦ 사업량 - 문화복지센터 2층(1,334.2㎡)
재래시장 공용주차장	◦ 사업비 : 1,341 백만원 ◦ 위 치 : 하진부리 128-2 일대 ◦ 사업량 - 부지조성 503㎡ - 철골구조 3층	◦ 사업비 : 1,086 백만원 ◦ 위 치 : (1) - 하진부리 123-1대 일원 (2) - 하진부리 206-11답 일원 ◦ 사업량 - 부지조성면적 : 대상지(1) - 988㎡, 대상지(2) - 941㎡ - 아스콘포장
진입관문 및 랜드마크 조성	◦ 사업비 : 354 백만원 ◦ 위 치 : 하진부리 산1-1도 일대 ◦ 사업량 - 소공원 조성(653㎡) - 조형물 1식	-	-
진입로가로경관정비	◦ 사업비 : 789 백만원 ◦ 위 치 : 하진부리 28-5도 일대 ◦ 사업량 - 화단조성 및 가로수 식재(700m)	◦ 사업비 : 252 백만원 ◦ 위 치 : 하진부리 28-5도 일대 ◦ 사업량 - 가로수 교체(마가목 128주), 보도포장 교체(700m)
지역역량 강화	◦ 사업비 : 319 백만원 ◦ 위 치 : 진부면소재지 일원 ◦ 사업량 - 주민교육, 리더교육, 선진지견학, 컨설팅 - 마을경영지원	-	2013. 10.04 선승인

7. 기능별사업계획

(단위 : 천원)

사 업 명	기본 계획		시행 계획		증감 내역		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
합 계	1식	7,000,000	1식	5,569,937 (651,219)	-	△778,844	별지작성 ( ) 선승인
○ 기초생활기반확충	1식	4,540,000	1식	4,318,706 (332,539)		111,245
스쿨존 및 학교가는길 조성	1건	699,000	1건	289,773 (332,539)	-	△76,688	초등학교 앞 선승인 (332,539)
진부 문화복지센터	1,390㎡	2,500,000	1,334.2㎡	2,942,328	△55.8㎡	442,328
재래시장 공용주차장	1,509㎡	1,341,000	1,929㎡	1,086,605	420㎡	△254,395
○ 지역경관개선사업	1식	1,143,000	1식	252,450		△890,550
진입관문 및 랜드마트조성	1건	354,000	1건	-	-	△354,000	(향후계획) 사업비:763,873
진입로가로경관정비	1건	789,000	1건	252,450	-	△536,550
○ 지역역량강화사업	1식	318,680	1식	(318,680)	-	-	2013.10.04 선승인
교육	1건	176,380	1건	176,380	-	-
컨설팅·홍보·정보화	3건	119,000	3건	119,000	-	-
마을경영	1건	23,300	1건	23,300	-	-
○ 제 경 비	1식	998,320	1식	998,781		461
-기본계획,세부설계, 공사감리비등	1건	998,320	1건	998,781	-	461

( ) 금액 외서, 선승인

사 업 비 수 지 예 산 서

(수입)

(단위 : 천원)

구 분	기본계획	시행계획				비고
		합 계	기승인	금회승인	향후계획
합 계	7,000,000	7,000,000	651,219	5,569,937	778,844
◦ 국 비	4,900,000	4,900,000	455,853	3,898,956	545,191
◦ 지방비	2,100,000	2,100,000	195,366	1,670,981	233,653
- 군 비	2,100,000	2,100,000	195,366	1,670,981	233,653

(지출)

(단위 : 천원)

구 분		기본계획	시행계획				비고
			합 계	기승인	금회승인	향후계획
합 계		<16,800> 7,000,000	<16,800> 7,000,000	651,219	5,569,937	778,844	<>:외서: 자부담
H/W 사업	스쿨존 및 학교가는길 조성	699,000	699,000	332,539	289,773	-
	문화복지센터 조성	2,500,000	2,500,000		2,942,328	-
	재래시장 공용주차장 조성	1,341,000	1,341,000		1,086,605	-
	진입관문 및 랜드마크 조성	354,000	354,000		-	778,844
	진입로 가로경관정비	789,000	789,000		252,450	-
S/W 사업	지역역량강화	<16,800> 318,680	<16,800> 318,680	318,680	-
기타	제경비	998,320	998,320		998,781

기능별 사업비(량) 증감사유서

(단위 : 천원)

사 업 명	기본계획(A)	시행계획	증△감 (B-A)	증 감 사 유
		금회승인(B)
합 계	7,000,000	5,569,937 (651,219)	△778,844	( ) 선승인
○ 기초생활기반확충	4,540,000	4,318,706 (332,539)	111,844
- 스쿨존 및 학교가는길 조성	699,000	289,773 (332,539)	△76,688
-토목(중.고등학교 앞)	234,000	289,773	55,773	용지보상비 증가
-토목(초등학교 앞)	465,000	(332,539)	△132,461	선승인 (사업비:332,539)
- 진부 문화복지센터	2,500,000	2,942,328	442,328	공공건축물 신재생에너지 의무사용으로 사업비 증가
- 재래시장 공용주차장	1,341,000	1,086,605	△254,395	지상주차장으로 변경
○ 지역경관개선사업	1,143,000	252,450	△890,550
- 진입관문 및 랜드마크 조성	354,000	-	△354,000	향후추진 (사업비:763,873)
- 진입로 가로경관정비	789,000	252,450	△536,550	중앙분리 녹지대 제외
○ 지역역량강화	<16,800> 318,680	<16,800> (318,680)	-	2013.10.04. 선승인
-교육	<16,800> 176,380	<16,800> 176,380	-
-컨설팅·홍보·정보화	119,000	119,000	-
-마을경영	23,300	23,300	-
○ 제경비	998,320	998,781	461	농어촌정비법에 의한 정산 및 남은 사업비 반영
기본계획,세부설계비,공사감리비 등	998,320	998,781	461