평창군 고시 제2015-41호

평창군 대화면소재지

종합정비사업 H/W사업 시행계획 고시

대화면소재지 종합정비사업 H/W사업 시행계획 승인사항을 농어촌정비법시행령제82조 규정에 의거 아래와 같이 고시합니다.

2015년   4월   17일

평     창     군     수

1. 고시 내용 : 아래와 같음.

2. 관계서류 및 도서는 평창군청 도시주택과(☏ 033-330-2418) 및 대화면

사무소에(☏ 033-330-2707)에 비치하여 일반인에게 보입니다.

3. 사업시행자 : 평창군(일괄위탁 : 한국농어촌공사 원주지사)

대화면소재지 종합정비사업 시행계획서

1. 사업개요

○ 위    치 : 강원도 평창군 대화면 대화리

○ 사업기간 : 2013 ~ 2016년(4년간)

○ 주요사업내용

- 기초생활기반확충 : 주민문화센터, 땀띠교, 공용주차장 및 주민상생      교류센터

- 지역경관개선부문 : 다목적광장, 시장로정비, 산소길조성

지역역량강화부문 : 교육, 컨설팅, 홍보마케팅

○ 소요사업비 : 7,000백만원(국비: 4,900, 지방비: 2,100)

▸ 자부담 : 8백만원(총 사업비에는 미포함)

2. 추진경위

2013. 03. 09 : 일반농산어촌개발사업(읍면소재지종합정비)확정

2013. 03. 25 : 기본계획 착수

2014. 12. 30 : 기본계획 승인(강원도)

2014. 02. 17 : 실시설계 대비 주민설명회 실시

2014. 03. 12 : 경관형성계획 및 실시설계 착수

2014. 07. 08 : 경관형성계획 및 실시설계 중간설명회 실시

2014. 08. 21 : 경관형성계획 및 실시설계 중간설명회 실시

2014. 10. 20 : 경관형성계획 및 실시설계 최종설명회 실시

2014. 11. 10 : 경관형성계획 및 실시설계 완료

3. 연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	연차별 사업비 투자내역					비 고
	합 계	2013년	2014년	2015년	2016년
합 계	<8> 7,000	956	1,511	<8> 1,511	3,022	<>:외서: 자부담
◦ 국 비	4,900	669	1,058	1,058	2,115
◦ 지방비	2,100	287	453	453	907
◦ 민간부담	<8>			<8>

4. 기본계획 승인내역 (‘14.12.30)

(단위 : 백만원)

구 분	사업명	사 업 내 용	사업비(백만원)	비 고
		기본계획	기본계획
합 계			<8> 7,000
기초 생활 기반 확충	주민 문화센터	□ 부지면적 : 3,951㎡ □ 건축 연면적 : 274㎡	1,625
	땀띠교량	□ 땀띠교 설치(L=105m, B=2m)	998
	공용주차장 및 주민상생교류센타	□ 부지면적 : 646㎡ □ 건축 연면적 : 178㎡	959
지역 경관 개선	다목적광장	□ 면적 : 383㎡	903
	시장로정비	□ 연장 : 68m(1브럭~2브럭)	689
	산소길조성	□ 연장 : L=2,100m -. 목재데크 : L=100m, -. 안전레일 : L=2,000m	602
지역 역량 강화	교육· 훈련	□ 리더양성교육 □ 주민교육 □ 문화복지교육 □ 국내선진지견학 □ 국외선진지견학	18 43 31 96 18<8>
	홍보 마케팅	□ 리플릿제작 □ 소식지제작 □ 마을축제지원	22 14 28
	정보화	□ 홈페이지구축 □ 홈페이지관리	20 7
	컨설팅	□ 체험프로그램개랍	15
	마을경영 지원	□ 추진위원회 □ 전문가자문료	21 3
부대비용		□ 기본계획수립비 외 제경비	888

5. 기본계획/시행계획 대비표

(단위 : 백만원)

구 분	사업명	사 업 내 용		사업비(백만원)		비 고
		기본계획	시행계획	기본계획	시행계획
합 계				<8> 7,000	<8> 7,000
기초 생활 기반 확충	주민문화 센터	□ 부지면적 : 3,951㎡ □ 건축 연면적 : 274㎡	□ 부지면적 : 6,162㎡ □ 건축 연면적 : 270.4㎡	1,625	2,166	향후추진
	땀띠교량	□ 땀띠교 설치(L=105m, B=2m)	□ 땀띠교 설치(L=95m, B=2.5m)	998	1,404	향후추진
	공용주차장 및 주민상생교류센타	□ 부지면적 : 646㎡ □ 건축 연면적 : 178㎡	□ 부지면적 : 1,571㎡ □ 건축 연면적 : 205.2㎡	959	656	향후추진
지역 경관 개선	다목적 광장	□ 면적 : 383㎡	□ 면적 : 1,056㎡	903	897	향후추진
	시장로 정비	□ 연장 : 68m(1브럭~2브럭)	□ 연장 : 61m(1브럭~2브럭)	689	472	금회시행
	산소길 조성	□ 연장 : L=2,100m -. 목재데크 : L=100m, -. 안전레일 : L=2,000m	□ 연장 : L=906m -. 전망데크 : 1개소(3000x3000) -. 목교 : 1개소(L=13m) -. 안전레일 : L=889m	602	272	금회시행
지역 역량 강화	교육· 훈련	□ 리더양성교육 □ 주민교육 □ 문화복지교육 □ 국내선진지견학 □ 국외선진지견학	□ 리더양성교육 □ 주민교육 □ 문화복지교육 □ 국내선진지견학 □ 국외선진지견학	18 43 31 96 18<8>	18 43 31 96 18<8>	2013.10 선승인
	홍보 마케팅	□ 리플릿제작 □ 소식지제작 □ 마을축제지원	□ 리플릿제작 □ 소식지제작 □ 마을축제지원	22 14 28	22 14 28
	정보화	□ 홈페이지구축 □ 홈페이지관리	□ 홈페이지구축 □ 홈페이지관리	20 7	20 7
	컨설팅	□ 체험프로그램개랍	□ 체험프로그램개랍	15	15
	마을경영 지원	□ 추진위원회 □ 전문가자문료	□ 추진위원회 □ 전문가자문료	21 3	21 3
부대비용		□ 기본계획수립비 외 제경비	□ 기본계획수립비 외 제경비	888	797

6. 시행계획 승인요청 내역

가. 사 업 량

사 업 명	기본계획	기승인	시행계획	비 고
합 계	6개사업	1개사업	2개사업
① 주민문화센터	1			향후추진
② 땀띠교량	1			“
③ 공용주차장및주민상생교류센터	1			“
④ 다목적광장	1			“
⑤ 시장로정비	1		1
⑥ 산소길조성	1		1
⑦ 지역역량강화	1	1

나. 사 업 비

(단위 : 천원)

사 업 명	기본계획 (A)	기승인	시행계획 (B)	증△감 (B-A)	비 고
합 계	<8,000> 7,000,000	<8,000> 336,000	834,619	<0> △5,829,381	<>:외서: 자부담
① 주민문화센터	1,625,000		-	△1,625,000	향후추진
② 땀띠교량	998,000		-	△998,000	“
③ 공용주차장 및 주민상생교류센터	959,000		-	△959,000	“
④ 다목적광장	903,000		-	△903,000	“
⑤ 시장로정비	689,000		471,695	△217,305	금회추진
⑥ 산소길조성	602,000		272,624	△329,376	금회추진
⑪ 지역역량강화	<8,000> 336,000	<8,000> 336,000	-	<0> 0	2013.10 선승인
⑫제경비	888,000		90,300	△797,700

7. 세부사업계획

사 업 명	기본계획	급회시행계획	비고
계	6개사업	2개사업
주민문화 센터	◦ 사업비 : 1,625백만원 ◦ 위 치 : 대화리 514-4전 ◦ 사업량 - 면적 : 3,951㎡(건축 연면적 : 264㎡) - 1층 : 회의실 및 청소년동아리방 - 부대시설 : 체육시설 및 공연장, 주차장, 기타 쉼터 및 조경시설 조성	-
땀띠교량	◦ 사업비 : 998백만원 ◦ 위 치 : 땀띠교와 대화7리교량 사이 평창천1707천 ◦ 사업량 - 땀띠교 설치(L=105m, B=2m)	-
공용주차장 및 주민상생 교류센터	◦ 사업비 : 959백만원 ◦ 위 치 : 대화리 1001-134대 외 6필지 ◦ 사업량 - 면적 : 646㎡ (건축 연면적 : 178㎡) - 1층 : 회의실 및 관리사무 - 2층 : 거실 및 주방, 휴게방 - 부대시설 : 주차장, 부지포장,기타 쉼터 및 조경시설	-
다목적광장	◦ 사업비 : 903백만원 ◦ 위 치 : 대화리 987-1대 ◦ 사업량 - 면적 : 383㎡ - 부대시설 : 야외무대, 부지포장, 기타 쉼터시설 기타 조경시설	-
시장로정비	◦ 사업비 : 689백만원(자부담30별도) ◦ 위 치 : 대화시장 1길 (대화시장2길 ~ 대화시장3길) ◦ 사업량 - 연장 : 지붕설치 : 68m(1브럭~2브럭) - 시장로 바닥 포장 178㎡	◦ 사업비 : 472백만원 ◦ 위 치 : 대화리 1001-10 일원 ◦ 사업량 - 시장 막구조 지붕설치 : 1개소(60m) - 시장로 바닥 포장 481㎡
산소길조성	◦ 사업비 : 602백만원 ◦ 위 치 : 땀띠공원 ~ 청용산 정상 ~ 더위사냥축제장 ◦ 사업량 - 연장 : L=2,100m . 목재데크 : L=100m . 안전레일 : L=2,000m	◦ 사업비 : 272백만원 ◦ 위 치 : 땀띠공원 ~ 청용산 정상 ~ 더위사냥축제장 ◦ 사업량 - 연장 : L=906m . 전망데크 : 1개소(3000x3000) . 목교 : 1개소(L=13m) . 안전레일 : L=889m
지역역량 강화	◦ 사업비 : 336백만원(자부담 : 8백만원) ◦ 위 치 : 평창군 대화리 주민 ◦ 사업량 - 주민교육, 홍보마케팅, 정보화, 컨설팅, 마을경영지원	-	2013.10 선승인

사 업 시 행 계 획 개 요

□ 대상지역의 범위

위    치 : 강원도 평창군 대화리

권역규모 : 법정리 1, 행정리 11

면    적 : 43.50㎢ (농경지 4.90㎢, 임야 34.30㎢, 기타 4.30㎢)

가구·인구 : 1,352호,  3,115명(남 1,513, 여 1,602)

□ 사업기간 : 2013년 01월~2016년 12월(4년간)

□ 총사업비 : 7,000백만원(보조 4,900백만원, 지방비 2,100백만원)

▸ 자부담 : 8백만원 (총 사업비에는 미포함)

□ 연차별 사업투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	연차별 사업비 투자내역					비 고
	합 계	2013년	2014년	2015년	2016년
합 계	<8> 7,000	956	1,511	<8> 1,511	3,022	<>:외서: 자부담
◦ 국 비	4,900	669	1,058	1,058	2,115
◦ 지방비	2,100	287	453	453	907
◦ 민간부담	<8>			<8>

기 능 별 사 업 내 역

(단위 : 천원)

사 업 명	기본계획(A)	세부설계	시행계획(B)		증△감 (B-A)	비 고
			기승인	금회승인
합 계	<8,000> 7,000,000	<8,000> 7,000,000	<8,000> 336,000	834,619	<0> △5,829,381	<>:외서:자부담
○ 주민문화센터	1,625,000	2,166,056	-		△1,625,000	향후 추진
용지매수 및 보상비	462,000	585,167
토목(부지조성 외)	79,000	324,904
건축(주민문화센터 외)	665,000	640,052
경관조경시설 외	419,000	615,933
○ 땀띠교량	998,000	1,403,747	-		△998,000	향후 추진
토목(교량설치 외)	955,000	1,387,367
경관조경시설 외	43,000	16,380
○ 공용주차장 및 주민상생교류센터	959,000	656,141	-		△959,000	향후 추진
용지매수 및 보상비	462,000	202,382
토목(부지조성 외)	43,000	168,097
건축(주민상생교류센터 외)	326,000	285,662
경관조경시설 외	128,000	-
○ 다목적광장	903,000	896,986	-		△903,000	향후 추진
용지매수 및 보상비	498,000	727,699
토목(부지조성 외)	62,000	-
건축(야외무대 외)	202,000	-
경관조경시설 외	141,000	169,287
○ 시장로정비	689,000	471,695		471,695	△217,305
지장물보상비	24,000	-		-	△24,000
토목(시장바닥정비 외)	16,000	32,233		32,233	16,233
건축(지붕설치 외)	602,000	402,558		402,558	△199,442
경관조경시설 외	47,000	36,904		36,904	△10,096
○ 산소길조성	602,000	272,624		272,624	△329,376
산소길정비 외	445,000	8,534		8,534	△436,466
경관조경시설 외	157,000	264,090		264,090	107,090
○ 지역역량강화	<8,000> 336,000	<8,000> 336,000	<8,000> 336,000		<0> 0	<>:외서:자부담30%
교육	<8,000> 206,000	<8,000> 206,000	<8,000> 206,000			2013.10 선승인
홍보마케팅	64,000	64,000	64,000
정보화	27,000	27,000	27,000
컨설팅	15,000	15,000	15,000
마을경영	24,000	24,000	24,000
○ 제경비	888,000	796,751		90,300	△797,700
기본계획,세부설계비,공사감리비등	888,000	796,751		90,300

사 업 비 수 지 예 산 서

(수입)

(단위 : 천원)

구 분	기본계획	시행계획				비고
		합 계	기승인	금회승인	향후계획
합 계	7,000,000	7,000,000	336,000	834,619	5,829,381
◦ 국 비	4,900,000	4,900,000	235,200	584,233	4,080,567
◦ 지방비	2,100,000	2,100,000	100,800	250,386	1,748,814
- 군 비	2,100,000	2,100,000	100,800	250,386	1,748,814

(지출)

(단위 : 천원)

구 분		기본계획	시행계획				비고
			합 계	기승인	금회승인	향후계획
합 계		<8,000> 7,000,000	<8,000> 7,000,000	<8,000> 336,000	834,619	5,829,381	<>:외서: 자부담
H/W 사업	주민문화센터	1,625,000	2,166,056		-	2,166,056
	땀띠교량	998,000	1,403,747		-	1,403,747
	공용주차장 및 주민상생교류센터	959,000	656,141		-	656,141
	다목적광장	903,000	896,986		-	896,986
	시장로정비	689,000	471,695		471,695	-
	산소길정비	602,000	272,624		272,624	-
S/W 사업	지역역량강화	<8,000> 336,000	<8,000> 336,000	<8,000> 336,000	-	-
기타	제경비	888,000	796,751		90,300	706,451

기능별 사업비 증감사유서

(단위 : 천원)

사 업 명	기본계획(A)	세부설계	시행계획(B)		증△감 (B-A)	증 감 사 유
			기 승인	금회승인
합 계	<8,000> 7,000,000	<8,000> 7,000,000	<8,000> 336,000	834,619	<0> 5,829,381	<>:외서:자부담
○ 주민문화센터	1,625,000	2,166,056	-		△1,625,000	향후 추진
용지매수 및 보상비	462,000	585,167
토목(부지조성 외)	79,000	324,904
건축(주민문화센터 외)	665,000	640,052
경관조경시설 외	419,000	615,933
○ 땀띠교량	998,000	1,403,747	-		△998,000	향후 추진
토목(교량설치 외)	955,000	1,387,367
경관조경시설 외	43,000	16,380
○ 공용주차장 및 주민상생교류센터	959,000	656,141	-		△959,000	향후 추진
용지매수 및 보상비	462,000	202,382
토목(부지조성 외)	43,000	168,097
건축(주민상생교류센터 외)	326,000	285,662
경관조경시설 외	128,000	-
○ 다목적광장	903,000	896,986	-		△903,000	향후 추진
용지매수 및 보상비	498,000	727,699
토목(부지조성 외)	62,000	-
건축(야외무대 외)	202,000	-
경관조경시설 외	141,000	169,287
○ 시장로정비	689,000	471,695		471,695	△217,305
지장물보상비	24,000	-		-	△24,000
토목(시장바닥정비 외)	16,000	32,233		32,233	16,233	바닥포장공사 조경시설에서 토목으로 변경
건축(지붕설치 외)	602,000	402,558		402,558	△199,442	상세설계에 따른 감
경관조경시설 외	47,000	36,904		36,904	△10,096	바닥포장공사 토목으로 변경
○ 산소길조성	602,000	272,624		272,624	△329,376
산소길정비 외	445,000	8,534		8,534	△436,466	사업규모축소 (당초:L=2,100m, 변경:L=920m)
경관조경시설 외	157,000	264,090		264,090	107,090	사업규모축소에 따라 조경시설 확대
○ 지역역량강화	<8,000> 336,000	<8,000> 336,000	<8,000> 336,000		<0> 0	<>:외서:자부담30%
교육	<8,000> 206,000	<8,000> 206,000	<8,000> 206,000		-
홍보마케팅	64,000	64,000	64,000		-
정보화	27,000	27,000	27,000		-
컨설팅	15,000	15,000	15,000		-
마을경영	24,000	24,000	24,000		-
○ 제경비	888,000	796,751		90,300	△797,700
기본계획,세부설계비,공사감리비등	888,000	796,751		90,300	△797,700