평창군 고시 제2016 - 35호

평창군 평창읍 거슬갑산권역 창조적마을만들기(권역단위종합개발사업) 기본계획 승인 고시

우리군 평창읍 거슬갑산권역 창조적마을만들기(권역단위종합개발사업)에 대해 농림사업시행지침의 규정에 의거 기본계획 승인을 득하고 농어촌정비법 시행령 제58조에 의거 아래와 같이 고시합니다.

2016년 4월 11일

평 창 군 수

1. 사 업 명 칭

가. 거슬갑산권역 창조적마을만들기(권역단위종합개발사업)

2. 사 업 목 적

가. 농촌다움의 유지․보전과 쾌적한 농촌 공간 조성

나. 지역의 잠재자원을 특성화하여 소득증대를 통한 자립기반 구축

다. 지역주민의 삶의 질 향상과 국토의 균형발전 도모

3. 위치 및 구역면적

가. 위  치 : 평창읍 마지1, 대상, 대하리(법정리 3, 행정리 3)

나. 면  적 : 1,572ha(농경지 208, 임야 1,224, 기타 140)

4. 추진경위

가. 기본계획수립 착수 보고회:‘15.03.26

나. 기본계획 중간 보고회:‘15.07.30

다. 역량강화(S/W)사업 착수 보고회:‘15.10.27

라. 강원도 협의 승인 :‘16.03.24

마. 기본계획 승인(평창군) :‘16.04.06

5. 사업개요(승인내용)

가. 사 업 비: 3,049백만원(국비 1,994, 군비 855, 자부담 200)

나. 사업기간: 2015~2018년(4년)

다. 주요사업내용(H/W 6개, S/W 3개)

① 거슬갑산 문화관

- 위    치: 평창읍 마지리 280-1외 1필지

- 사 업 비: 436백만원(보조 436)

- 사업기간: 2017~2018년(3~4년차)

- 사업내용: 건물 신축(2층, 184.8㎡), 토지매입(462㎡)

➁ 거슬갑산 농산물가공공장

- 위    치: 평창읍 대하리 229외 2필지

- 사 업 비: 1,000백만원(보조 800, 자부담 200)

- 사업기간: 2016~2017년(2~3년차)

- 사업내용: 농산물가공공장 신축(1층 396㎡), 기계설비, 오수처리시설 등

③ 거슬치길 쉼터 조성

- 위    치: 평창읍 마지리 산91번지

- 사 업 비: 50백만원(보조 50)

- 사업기간: 2015년(1년차)

- 사업내용: 정자설치 1동, 성황당 보수

④ 거슬갑산 경관수목식재

- 위    치: 평창읍 마지1,대상, 대하리 일원

- 사 업 비: 235백만원(보조 235)

- 사업기간: 2017~2018년(3~4년차)

- 사업내용: 도로경관개선 및 경관수 식재(돌배나무, 대추나무, 산수유 등)

⑤ 거슬갑산 경관조성

- 위    치: 거슬갑산권역 일원

- 사 업 비: 70백만원(보조 70)

- 사업기간: 2015년(1년차)

- 사업내용: 마을 안내판(10개소), 대상리 대상교 LED 조명 보완

⑥ 거슬갑산 테마공원

- 위    치: 평창읍 대상리 142외 2필지

- 사 업 비: 520백만원(보조 520)

- 사업기간: 2018년(4년차)

- 사업내용: 면적(6,652㎡), 게이트볼 및 풋살 경기장, 야외공연장, 화장실, 조경 등

⑦ 지역역량강화(S/W)사업 : 3개 사업

- 사 업 비: 337백만원(보조 337)

- 사업기간: 2015~2018년(1~4년차)

- 사업내용: 교육부문, 컨설팅부문, 마을경영지원

⑧ 제경비

- 사 업 비: 401백만원(보조 401)

- 사업기간: 2015~2018년(1~4년차)

- 사업내용: 세부설계비, 공사감리비, 사업관리비, 기본 및 경관계획, 잡지출

6. 사업의 효과

가. 농촌지역의 기초생활기반 확충, 지역소득 증대, 경관 개선 등 생활환경 개선을 통한

정주여건 개선으로 주민의 삶의 질 향상.

7. 사업시행자: 평창군 및 한국농어촌공사 원주지사

8. 기타

가. 기본계획 승인 내용은 평창군 농축산과에 비치하고 일반인에게 보이며, 사업 시행과정

에서 변경이 있을 수 있음.