평창군 고시 제2017-8호

평창군 미탄면 회동2리 창조적마을만들기(환경-경관·생태)사업 시행계획 승인 고시

우리군 미탄면 회동2리 창조적마을만들기(환경-경관·생태)사업에 대해 농림축산식품사업시행지침의 규정에 의거 시행계획 승인을 득하고 농어촌정비법 시행령 제58조에 의거 아래와 같이 고시합니다.

2017년 1월 20일

평  창  군  수

1. 사 업 명 칭

가. 회동2리 창조적마을만들기(환경-경관·생태)사업

2. 사 업 목 적

가. 농촌다움의 유지․보전과 쾌적한 농촌 공간 조성

나. 농업 및 자연경관자원을 통한 농외소득증대

다. 지역주민의 삶의 질 향상과 국토의 균형발전 도모

3. 위치 및 구역면적

가. 위  치: 미탄면 회동2리(법정리 1, 행정리 1)

나. 면  적: 1,196ha(농경지 119, 임야 957, 기타 120)

4. 추진경위

가.‘16년 신규사업 선정:‘15.10.02

나. 기본계획수립 착수 보고회:‘16.04.14

다. 기본계획수립 중간 보고회:‘16.05.23

라. 기본계획수립 최종 보고회:‘16.06.09

마. 기본게획 강원도 협의 승인:‘16.07.25

바. 기본계획 평창군 승인:‘16.07.26

사. 세부설계 업체 선정(강철기술단):‘16.08.25

아. 세부설계 완료:‘16.12.13

5. 사업개요(승인내용)

가. 사 업 비: 500백만원(국비 350, 군비 150, 자부담 0)

나. 사업기간: 2016~2017년(2년)

다. 주요사업내용(H/W 4개, S/W 3개)

① 생태하수처리장

- 위    치: 미탄면 회동리 619

- 사 업 비: 8,939천원(보조 8,939)

- 사업기간: 2017년(2년차)

- 사업내용: 생태하수처리장 조성 1개소(수로, 수생식물 식재 등)

➁ 친환경 산책로

- 위    치: 미탐면 회동리 산32

- 사 업 비: 38,390천원(보조 38,390)

- 사업기간: 2017년(2년차)

- 사업내용: 산책로 정비(목재계단, 목교, 안전난간, 방향안내판 등)

③ 깨비쌈지 공원

- 위    치: 미탄면 회동리 619

- 사 업 비: 296,220천원(보조 296,220)

- 사업기간: 2016~2017년(1~2년차)

- 사업내용: 기초토목(석축 206m, 평탄작업 261.91㎡), 족구장(444㎡), 휀스 84m,                      다목적광장(목재계단 3개소, 잔디블럭포장 85㎡, 느티나무 8주, 야외

테이블 6개소 등), 깨비쌈지공원(칼라ILP포장 288㎡, 경계재 506m 등),

지압로 19㎡, 신재생에너지(태양광 가로등 2EA, 자가발전기구 4EA)

④ 깨비조형물 제작

- 위    치: 미탄면 회동리 619

- 사 업 비: 47,717천원(보조 47,717)

- 사업기간: 2017년(2년차)

- 사업내용: 깨비조형물제작(입구조형계이트 1식)

⑤ 지역역량강화(S/W)사업 : 3개 사업

- 사 업 비: 46,000원(보조 46,000)

- 사업기간: 2016~2017년(1~2년차)

- 사업내용: 교육부문, 홍보마케팅부문, 컨설팅 부문

* 교육부문: 전문가초청교육, 위탁교육, 국내선진지 견학

* 홍보마케팅부문: 축제기획 및 운영 지원

* 컨설팅 부문: 마을 중장기 발전계획 수립

⑥ 제경비

- 사 업 비: 62,734만원(보조 62,734)

- 사업기간: 2016~2017년(1~2년차)

- 사업내용: 기본계획수립비, 세부설계비, 공사감리비, 사업관리비

6. 사업의 효과

가. 농촌지역의 경관 및 정주여건을 개선하여 주민의 삶의 질 향상

7. 사업시행자: 평창군 및 한국농어촌공사 원주지사

8. 기타

가. 시행계획 승인 내용은 평창군 농축산과에 비치하고 일반인에게 보이며, 사업 시행과정

에서 변경이 있을 수 있음.