평창군 고시 제2017–75호

평창군 방림면 농촌중심지활성화사업 기본계획 고시

방림면 농촌중심지활성화사업 기본계획에 대하여 농어촌정비법 제58조 같은법 시행령 제82조 규정에 의거 다음과 같이 고시합니다.

2017년 6월 16일

평   창   군   수

1. 고시 내용 : 아래와 같음.

2. 관계서류 및 도서는 평창군청 도시주택과(☏ 033-330-2014) 및 방림면사무소 총무담당

(☏ 033-330-2603)에 비치하여 일반인에게 보입니다.

3. 사업시행자 : 평창군(일괄위탁 : 한국농어촌공사 원주지사)

평창군 방림면 농촌중심지활성화사업

□ 일반현황

○ 위    치 : 평창군 방림면 방림1리, 방림3리, 방림5리

▸ 법정리 1개리, 행정리 14개리, 58반

○ 면    적 :  12,083㏊(농경지 1404.9ha, 임야 9,904ha)

○ 가구 및 인구 : 1,284호, 2,532명(남1,280 , 여1,252)

○ 사 업 량 : 3개부문 11개사업 (H/W 7개사업, S/W 5개사업)

○ 사 업 비 : 5,000백만원(국비 3,500, 군비 1,500)

▸ 자부담 :    - 백만원 (총 사업비에는 미포함)

○ 사업기간 : 2016년 ~ 2019년(4년)

□ 비전 및 목표

□ 그간 추진경과

○ 기본계획 착수보고회 : ‘16. 04. 01

○ 기본계획 추진위원회(1차) : ‘16. 05. 10

○ 기본계획 추진위원회(2차) : ‘16. 05. 23

○ 경관형성계획 및 건축컨셉수립 용역 착수 : `16. 05. 30

○ 기본계획 추진위원회(3차) : ‘16. 06. 07

○ 기본계획 추진위원회(4차) : ‘16. 06. 20

○ 기본계획 추진위원회(5차) : ‘16. 07. 11

○ 지역역량강화 강원도협의 완료 : ‘16. 07. 26

○ 사업전담 전문가 위촉  : `16. 07. 26

○ 기본계획 추진위원회(6차) : ‘16. 08. 11

○ 기본계획 추진위원회(7차) : ‘16. 08. 29

○ 기본계획 추진위원회(8차) : ‘16. 09. 08

○ 기본계획 추진위원회(9차) : ‘16. 09. 29

○ 기본계획 추진위원회(10차) : ‘16. 10. 11

○ 기본계획 추진위원회(11차) : ‘16. 11. 15

□ 사업계획(총괄)

단위 : 백만원

구 분		연차별 사업비 투자계획					비고
기능별	세부사업	계	2016년	2017년	2018년	2019년
총 계		5,000	600	700	2,510	1,190
기초 생활 기반 확충	파머스삼촌센터	2,186	-	416.0	1,610	160
	삼산모란가지 광장	243	-	-	175.0	68
	쉼터조성	708	237.5	90.5	242.3	137.7
	소 계	3,137	237.5	506.5	2,027.3	365.7
지역 경관 개선	평창강스마트로드	331	-	-	39	292
	삼삼한힐링로드	336	-	-	74	262
	전통자원주변정비	68	-	16.9	32.1	19
	중심로가로 등 정비	83	-	-	50	33
	소 계	818	-	16.9	195.1	606
지역 역량 강화	교육	139.6	28.9	40.9	38.9	30.9
	홍보마케팅	44	11	11	11	11
	컨설팅	32.3	-	6.3	16	10
	정보화	48.3	-	19	29.3	-
	마을운영지원	74.8	13.6	20.4	20.4	20.4
	소 계	339	53.5	97.6	115.6	72.3
제경비	기본계획수립비	191.7	191.7	-	-	-
	세부설계비	107	107	-	-	-
	공사감리비	300	-	58	118	124
	사업관리비	60	-	12	38	10
	기타부대비	47.3	10.3	9.0	16.0	12
	소 계	706	309	79	172	146

□ 세부사업내용

① 파머스 삼촌(三村)센터

사 업 대 상 지	대상지 현황

○ 필 요 성 : 방림면 전체 지역주민간의 공동편의 시설, 커뮤니티센터의 부재

해소 및 연계전략을 통한 방림면의 문화⋅복지활동 공간 필요

○ 위    치 : 방림면 방림리 1266-4답 외5필지

○ 사 업 비 : 2,186백만원(보조)

○ 사업기간 : 2017년~2019년

○ 주요 계획내용

- 건축공사 : 신축 (660㎡/1,610백만원) : 1층 소공연장 및 삼베삼굿놀이 연습장 2층 동아리실,

회의실, 작은도서관, 각종단체 사무실

- 태양광시설 : (20kw/50백만원)

- 토목공사 : 담장설치, 디자인파고라 등 (62백만원)

- 용지매수(629㎡/157백만원), 폐기물처리비(1,834ton/116백만원)

- 기타보상비(191백만원) 구)농협창고, 컨테이너이전 강우량계 이전 등

○ 투자계획

단위(백만원)

구 분	연차별 투자
계	1년차	2년차	3년차	4년차
2,186		416	1,610	160

○ 활용 및 운영계획

- 방림면에 소공연장, 삼베삼굿놀이 연습실, 동아리실, 작은도서관 등을 설치하여 지역주민

의 높은 문화복지 수요를 충족시켜 정주의식을 고취

- 본 사업 준공 후 시설물에 대한 유지관리는 평창군과 운영위원회 간 협약서를 체결하

여 관리하고, 운영관리는 운영위원회에서 총괄 관리하며 세부사항은 운영위원회의

자치규약에 따름

※ 시설물 유지관리비(추정치) : 520천원/월

- 전기세 : 410천원/월

▮ 예상 소비전력(추정치)

구분	층수 (면적)	용도	면적 (m²)	소요전력 (kw)	사용시간 (월)	소비전력 (kw)
파머스 삼촌센터	1층 (330)	소공연장	224	15	40시간	600
		사무실	10	4	40시간	160
		미팅룸	10	2	40시간	80
		화장실	20	2	30시간	60
		계 단	66	-	-	-
	2층 (330)	회의실	64	4	20시간	80
		사무실	24	4	40시간	160
		사무실	30	4	40시간	160
		동아리실	44	2	60시간	120
		작은도서관	39	2	200시간	400
		화장실, 휴게실	63	2	30시간	60
		계 단	66	-	-	-
총 소비전력						1,880

- 통신료 : 40천원(전화, 인터넷망)

- 상하수도료 : 20천원/월,

- 환경관리비, 예비비 : 50천원/월

∘ 운영자금 조달계획 : 520천원/월

- 운영기금 : 110천원/월(방림면 번영위원회, 체육회사무실 사용료)

- 전기세 : 410천원/월(태양광발전 20KW*6.5h*20day=2,600KW)

※ 운영관리비 집행 후 잔액은 시설물유지관리비로 적립 후 사용

○ 현황

○ 조감도

② 삼산모란가지 광장 조성

사 업 대 상 지	대상지 현황

○ 필 요 성 : 지역주민을 비롯한 배후지역주민과 방문객이 중심지의 체류기간 연장의 필요

성이 제기 되었으며, 중심지 공간에 지역주민간의 교류 공간 필요

○ 위    치 : 방림면 방림리 1266-3답, 1264-9답

○ 사 업 비 : 243백만원(보조)

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2019년

○ 주요 계획내용

- 토목공사 : 부지조성 및 점토블럭 포장 (983㎡/77백만원)

- 조경공사 : 시설안내판, 벤치, 가로등, 이동식무대 등 (1식/166백만원)

○ 투자계획

단위(백만원)

구분	연차별 투자
계	1년차	2년차	3년차	4년차
243	-	-	175	68

○ 활용 및 운영계획

- 지역주민들의 문화⋅축제⋅교류공간으로 활용

- 본 사업준공 후 시설물에 대해 평창군과 운영위원회간 협약서를 체결하여 유지관리하

고, 운영관리는 운영위원회에서 총괄 관리하며 세부사항은 운영위원회의 자치규약에

따름

○ 현황

○ 조감도

③ 쉼터조성

사 업 대 상 지	대상지 현황

○ 필 요 성 : 마을내 쉼터 공간과 체육시설을 연계하여 마을 주민의 건강 및 여가 활동

을 위한 공간 조성

○ 위    치 : 방림면 방림리 1284-27대

○ 사 업 비 : 708백만원(보조)

○ 사업기간 : 2016년 ~ 2019년

○ 주요 계획내용

- 토목공사 : 족구장, 배드민턴장, 부지조성, 안전휀스 (217백만원)

- 조경공사 : 음수대, 화장실, 간이운동시설 등(206백만원)

- 용지매수 및 영농손실보상 (1,532㎡/285백만원)

○ 투자계획

단위(백만원)

구분	연차별 투자
계	1년차	2년차	3년차	4년차
708	237.5	90.5	242.3	137.7

○ 활용 및 운영계획

- 사업효과를 극대화하고 지속가능한 개발을 위해 평창군 및 지역주민이 주인의식을 갖고 책

임성과 공공성 확보와 운영에 대한 투명성을 바탕으로 공공목적으로 사용이 이루어져

야 함

- 본 사업준공 후 시설물에 대해 평창군과 운영위원회간 협약서를 체결하여 유지관리하

고, 운영관리는 운영위원회에서 총괄 관리하며 세부사항은 운영위원회의 자치규약에

따름

○ 현황

○ 조감도

④ 평창강 스마트로드

사 업 대 상 지	대상지 현황

○ 필 요 성 : 제방둑을 산책시 초저녁에 시야 확보가 되지 않아 가로등을 설치하여 경관

및 주민들의 안전을 확보하고 차량이동시 대기차선이 필요

○ 위    치 : 방림면 방림리 1리, 5리 일원

○ 사 업 비 : 331백만원(보조)

○ 사업기간 : 2018년~2019년

○ 주요 계획내용

- 토목공사 : 연결도로, 옹벽쌓기, 진입로 정비등 (177백만원)

- 조경공사 : 가로등, 울타리, 시설안내판,(154백만원)

○ 투자계획

구분	연차별 투자
계	1년차	2년차	3년차	4년차
331	-	-	39	292

○ 활용 및 운영계획

- 평창강 스마트로드를 정비하여 지역주민의 안전확보와 경관조성을 하여 관광객의 유

입 증대로 지역경제의 활성화 도모

- 본 사업준공 후 시설물에 대해 평창군과 운영위원회 간 협약서를 체결하여 유지관리

하고, 운영관리는 운영위원회에서 총괄 관리하며 세부사항은 운영위원회의 자치규약

에 따름

○ 현황

○ 조감도

⑤ 삼삼한 힐링로드

사 업 대 상 지	대상지 현황

○ 필 요 성 : 기존 산책로 구간을 정비하여 방림면을 아우르는 산림 트레킹 로드와 지역주

민을 비롯한 배후지역주민의 건강 향상과 화합 증진

○ 위    치 : 방림면 방림리 1603-2임 일원

○ 사 업 비 : 331백만원(보조)

○ 사업기간 : 2018년~2019년

○ 주요 계획내용

- 토목공사 : 산책로정비 (3,000m/186백만원)

- 침목계단, 방향표지판, 등의자, 야자매트 등(150백만원)

○ 투자계획

단위(백만원)

구분	연차별 투자
계	1년차	2년차	3년차	4년차
336	-	-	74	262

○ 활용 및 운영계획

- 본 사업준공 후 시설물에 대해 평창군과 운영위원회 간 협약서를 체결하여 유지관리

하고, 운영관리는 운영위원회에서 총괄 관리하며 세부사항은 운영위원회의 자치규약

에 따름

○ 현황

○ 조감도

⑥ 전통자원 주변정비

사 업 대 상 지	대상지 현황

○ 필 요 성 : 마을 중심지에 있는 성황당 및 편의시설이 노후 되어 중심지의 경관을 저해함

으로 성황당을 정비하고 마을 주민들의 편의 제공 및 경관조성을 위해 필요

○ 위    치 : 방림면 방림리 1289-1임

○ 사 업 비 : 68백만원(보조)

○ 사업기간 : 2017년 ~ 2019년

○ 주요 계획내용

- 토목공사 :  주변정비 (1식/48백만원)

- 건축공사 : 성황당리모델링 (1식/20백만원)

○ 투자계획

구분	연차별 투자
계	1년차	2년차	3년차	4년차
68	-	16.9	32.1	19.0

○ 활용 및 운영계획

- 주민이 정기적으로 잡초제거, 곁가지 치기 등의 관리를 시행하고 분기별로 주변의 편

의시설을 점검하여 이용에 불편이 없도록 관리 운영

- 사업 추진에 따른 시설물에 대한 소유는 평창군이며 운영 및 유지는 추진위원회에

서 관리하도록 함

○ 현황

○ 조감도

⑦ 중심로 가로등 정비

사 업 대 상 지	대상지 현황

○ 필 요 성 : 면소재지의 주택과 상가가 42번 국도변으로 밀집되어 있어 야간에 보행자 이동

시 안전사고 발생 우려가 있어 가로등을 설치하여 보행자의 안전사고 예방과

지역 경관 개선을 위해 필요

○ 위    치 : 방림면 중심지

○ 사 업 비 : 83백만원(보조)

○ 사업기간 : 2018년~2019년

○ 주요 계획내용

- 조경공사 : 보행등 (1식/83백만원)

○ 투자계획

구분	연차별 투자
계	1년차	2년차	3년차	4년차
83	-	-	50	33

○ 활용 및 운영계획

- 중심로 가로정비를 하여 야간에 지역주민의 안전 확보와 경관조성을 하여 관광객의 유

입 증대로 지역경제의 활성화 도모

- 본 사업준공 후 시설유지보수 및 운영관리 책임은 시설별 소유주가 자체적으로 유지

관리 계획 수립 추진

○ 현황

○ 조감도

⑧ 지역역량강화(S/W)

○ 위    치 : 평창군 방림면 일원

○ 사 업 비 : 339백만원

○ 사업기간 : 2016년 ~ 2019년

○ 주요 계획내용 : 5개 사업

- 주민교육 및 견학(1식 139.6백만원)

- 홍보마케팅(1식 44백만원)

- 컨설팅(1식 32.3백만원)

- 정보화(1식 48.3백만원)

- 권역운영지원(1식 74.8백만원)