평창군 방림면농촌중심지활성화 2차 시행계획(안)

[기초생활기반확충 – 파머스삼촌센터, 삼산모란가지광장]

2018. 11.

	한국농어촌공사 원주지사

방림면 농촌중심자활성화사업 시행계획 개요
[기초생활기반확충 – 파머스삼촌센터, 삼산모란가지광장]

1. 사업개요

○ 위    치 : 강원도 평창군 방림면 방림리 일원(방림1리~방림5리)

○ 규    모 : 법정리 1개리, 행정리 14개리

○ 면    적 : 12,083ha(농경지 1404.9ha, 임야및기타 10,673.1ha)

○ 사업기간 : 2016년 ~ 2019년(4개년)

○ 사 업 비 : 5,000백만원(국비 3,500백만원, 군비 1,500백만원)

○ 주요공사 : 3개분야(11개사업)

- 기초생활기반확충 : 파머스삼촌센터, 삼산모란가지광장, 쉼터조성

- 지역경관개선 : 평창강 스마트로드, 삼삼한 힐링로드, 전통자원주변정비

중심로 가로등 정비

- 지역역량강화 : 주민교육, 컨설팅, 정보화, 마을경영지원

2. 추진경위

○ 사업대상지 선정(농식품부) : 2015. 12.

○ 한국농어촌공사 일괄 위(수)탁 계약 : 2016. 02. 03.

○ 기본계획착수 및 승인 : 2016. 02. ~ 2017. 06.

○ 지역역량강화 시행(㈜착한동네) : 2016. 10. ~

○ 세부설계 착수 및 협의 : 2017. 08. ~ 2018. 05.

○ 세부설계 1차 시행계획 승인(지역경관개선사업) : 2018. 06. 07.

3. 연차별투자계획

구 분	년도별 투자 기본계획(백만원)					비 고
	합계	2016년	2017년	2018년	2019년
합 계	5,000	600	700	1,510	2,190
기초생활 기반확충	3,137	238	506	1,027	1,366
지역경관 개 선	818	0	17	195	606
지역역량 강화사업	339	53	98	116	72
제 경 비	706	309	79	172	146

기 능 별 사 업 내 역

(단위 : 천원)

사업명	기본계획		시행계획		증∆감내역		사유	변경 비율 (%)
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
합계		5,000,000		5,000,000		-
○ 기초생활기반확충	소 계	3,137,000		3,020,919		∆116,081		34.31
-파머스삼촌센터	건축연면적 660㎡	2,186,000	건축연면적 495.66㎡	1,589,784	-	∆596,216	금회승인
-삼산모란가지광장	983㎡	243,000	1,037㎡	267,687	-	24,687
-쉼터조성	1,532㎡	708,000	1,532㎡	1,163,448	-	455,448	프로방스 및 포켓쉼터 주민협의 지연
○ 지역경관개선	소 계	818,000		934,081		116,081		-
-평창강스마트로드	150m	331,000	150m	233,320	-	∆97,680	기승인 (2018.06.07.)
-삼삼한 힐링로드	3km	336,000	247m	475,636	-	139,636
-전통자원주변정비	524㎡	68,000	250㎡	128,510	-	60,510
-중심로가로등정비	1식	83,000	1식	96,615	-	13,615
○ 지역역량강화사업	소 계	339,000		339,000	-	-		-
-교육부분	1식	139,600	1식	139,600	-	-
-홍보마케팅	1식	44,000	1식	44,000	-	-
-컨 설 팅	1식	32,300	1식	32,300	-	-
-정 보 화	1식	48,300	1식	48,300	-	-
-마을운영지원	1식	74,800	1식	74,800	-	-
○ 제 경 비	소 계	706,000		706,000	-	-		-
-기본계획비	1식	191,700	1식	191,700	-	-
-세부설계비	1식	107,000	1식	107,000	-	-
-공사감독비	1식	300,000	1식	300,000	-	-
-사업관리비	1식	60,000	1식	60,000	-	-
-기타부대비	1식	47,300	1식	47,300	-	-

사 업 비 수 지 예 산 서

(수입)

(단위 : 천원)

구분	기본계획	시행계획				비고
		합계	기승인	금회승인	향후계획
합 계	5,000,000	5,000,000	1,979,081	1,857,471	1,163,448
-국 비	3,500,000	3,500,000	1,385,357	1,300,230	814,413
-군 비	1,500,000	1,500,000	593,724	557,241	349,035
-자 부 담	-	-	-	-	-

※ ( )외서 자부담

(지출)

(단위 : 천원)

구분		기본계획	시행계획				비고
			합계	기승인	금회승인	향후계획
합계		5,000,000	5,000,000	1,979,081	1,857,471	1,163,448
H / W 사 업	소 계	3,955,000	3,955,000	934,081	1,857,471	1,163,448
	○기초생활기반확충	3,137,000	3,020,919	-	1,857,471	1,163,448
	-파머스삼촌센터	2,186,000	1,589,784	-	1,589,784	-
	-삼산모란가지광장	243,000	267,687	-	267,687	-
	-쉼터조성	708,000	1,163,448	-	-	1,163,448
	○지역경관개선	818,000	934,081	934,081	-	-
	-평창강스마트로드	331,000	233,320	233,320	-	-
	-삼삼한힐링로드	336,000	475,636	475,636	-	-
	-전통자원주변정비	68,000	128,510	128,510	-	-
	-중심로가로등정비	83,000	96,615	96,615	-	-
S / W사업	지역역량강화	339,000	339,000	339,000	-
	-교육부분	139,600	139,600	139,600	-
	-홍보마케팅	44,000	44,000	44,000	-
	-컨 설 팅	32,300	32,300	32,300	-
	-정 보 화	48,300	48,300	48,300	-
	-마을경영지원	74,800	74,800	74,800	-
제경비	제 경 비	706,000	706,000	706,000	-
	-기본계획비	191,700	191,700	191,700	-
	-세부설계비	107,000	107,000	107,000	-
	-공사감리비	300,000	300,000	300,000	-
	-사업관리비	60,000	60,000	60,000	-
	-기타부대비	47,300	47,300	47,300	-

계 획 수 립  인 가 의 견 서

사업명		기본계획	시행계획	의 견
구 분		2개사업	2개사업
기초생활기반확충	파머스 삼촌센터	□사업비 : 2,168백만원 □위치: 1266-2답 외5필지 □사업량 - 연면적 A=660㎡ - 태양광설치 20kw, 폐기물처리	□사업비 : 1,589백만원 □위치: 1266-3답, 1264-9답 □사업량 - 연면적 A=495.66㎡ ·1층 A=249.96㎡ ·2층 A=245.70㎡ - 태양광설치 19kw - 조형물 1식, 시설안내판	○ 방림면내에 복지공간이 협소하고 지역주민들의 문화공간 및 휴게공간 조성을 통한 복지시설 확대
	삼산모란 가지광장	□사업비 : 243백만원 □위치: 방림리 1266-3답외1 □사업량(A=983㎡) - 부지조성 A=983㎡ - 시설안내판 1개소, 가로등 - 파고라 2개소	□사업비 : 267백만원 □위치: 방림리 1266-5대외2 □사업량(A=1,037㎡) - 보도포장(T6cm) A=470㎡ - 무대조성 - 가로등, 파고라, 주차시설	○ 파머스 삼촌센터와 연계하여 방림면 주민들의 여가 활동 및 지역 행사시 광장을 활용한 방림면민들의 편의성과 삶의 질 향상

사업시행자 검토의견서

부 문 별	검 토 내 용
파머스 삼촌센터	< 사 업 개 요 > ⃞ 위 치 : 방림면 1266-3(답), 1264-9(답) ⃞ 사업비 : 1,589,784천원 ⃞ 주요공사 ○ 사업내용 - 파머스삼촌센터 : A=495.66㎡ ·1층 A=249.96㎡ ·2층 A=245.70㎡ - 태양광 설치 : 19kw - 조형물 설치 1식 - 시설안내판 1개소 < 계획 평면도 > < 검 토 사 항 > ⃞ 기본계획 대비 사업비 증감여부 (감 596,216천원) ⃞ 단가산출서, 수량산출서, 공사비명세서의 적합성여부 (적합) ⃞ 추진위원회 의견 반영여부 (반영) ⃞ 인.허가 등 관련법 저촉여부 (승인)

부 문 별	검 토 내 용
삼산모란가지광장	< 사 업 개 요 > ⃞ 위 치 : 방림리 1266-5(대) 외 2필지 ⃞ 사업비 : 267,687천원 ⃞ 주요공사 ○ 사업내용 - 부지정리 A=1,037㎡ - 보도블럭 설치, 차양시설, 음수대 - 경관등, 조경수 설치 등 < 계획 평면도 > < 검 토 사 항 > ⃞ 기본계획 대비 사업비 증감여부 (증 24,687천원) ⃞ 단가산출서, 수량산출서, 공사비명세서의 적합성여부 (적합) ⃞ 추진위원회 의견 반영여부 (반영) ⃞ 인.허가 등 관련법 저촉여부 (승인)

파머스삼촌센터 계획평면도(1)

파머스삼촌센터 1층 평면도(2)

파머스삼촌센터 2층 평면도(3)

파머스삼촌센터 지붕 평면도(4)

삼산모란가지광장 계획평면도