평창군 고시 제 2019 - 128호

평창군 용평면 백옥포1 창조적마을만들기(마을단위종합개발)사업 시행계획 승인 고시

우리군 용평면 백옥포1리 창조적마을만들기(마을단위종합개발)사업에 대해 농림축산식품사업시행지침의 규정에 의거 시행계획 승인을 득하고 농어촌정비법 시행령 제58조에 의거   아래와 같이 고시합니다.

2019년 7월 18일

평 창 군 수

1. 사 업 명 칭

가. 백옥포1리 창조적마을만들기(마을단위종합개발)사업

2. 사 업 목 적

가. 농촌다움의 유지․보전과 쾌적한 농촌 공간 조성

나. 농업 및 자연경관자원을 통한 농외소득증대

다. 지역주민의 삶의 질 향상과 국토의 균형발전 도모

3. 위치 및 구역면적

가. 위  치: 용평면 백옥포1리(법정리 1, 행정리 1)

나. 면  적: 342ha

4. 추진경위

가.‘17년 신규사업 선정:‘17.09.07

나. 기본계획수립 착수 보고회:‘18.05.28

다. 기본계획수립 중간 보고회:‘18.07.20

라. 기본계획수립 최종 보고회:‘18.08.08

마. 기본계획 수립보고회(강원도):‘18.08.17

바. 기본게획 강원도 협의 승인:‘18.11.29

사. 기본계획 평창군 승인:‘19.01.07

아. 세부설계 업체 선정[(주)다올엔지니어링건축사사무소]:‘19.03.25

자. 세부설계 완료:‘19.07.31

5. 사업개요(승인내용)

가. 사 업 비: 982백만원(국비 687, 군비 295, 자부담 0)

나. 사업기간: 2018 ~ 2020년(3년)

다. 주요사업내용(H/W 4개, S/W 4개)

① 건강복지행복관

- 위    치: 용평면 백옥포리 184-3

- 사 업 비: 550백만원(보조 550)

- 사업기간: 2018 ~ 2019년

- 사업내용: 건강복지행복관 신축 113㎡, 태양광발전시설 설치, 냉난방기설치,   주차장 조성 423㎡

➁ 마을관리시스템 구축

- 위    치: 용평면 백옥포1리 마을 일원

- 사 업 비: 80백만원(보조 80)

- 사업기간: 2020년

- 사업내용: 메인시스템 1개소, 수신기 60개소, cctv설치6대, 영상설비 신설1대

③ 흥소리광장

- 위    치: 용평면 백옥포 175-25 외 2필지

- 사 업 비: 109백만원(보조 109)

- 사업기간: 2019~2020년

- 사업내용: 기초토목공사, 배수로정비, 스포츠공간조성, 잔디식재, 블록(차도용, 인도용), 파고라설치

④ 엣소리길 정비사업

- 위    치: 용평면 백옥포리 482-17 일원

- 사 업 비:31백만원(보조 31)

- 사업기간: 2020년

- 사업내용: 벤치설치 8개소, 이정표설치 3개소, 마을 종합안내판설치 2개소

⑤ 지역역량강화(S/W)사업 : 4개 사업

- 사 업 비: 85백만원(보조 85)

- 사업기간: 2018~2020년

- 사업내용: 교육부문, 홍보마케팅부문, 컨설팅 부문

* 교육부문: 맞춤형교육, 마을특성화교육, 전문가 초청교육, 국내선진지 견학

* 홍보마케팅부문: 마을소식지제작, 축제지원

* 컨설팅 부문: 일반컨설팅

⑥ 제경비

- 사 업 비: 127백만원(보조 127)

- 사업기간: 2018~2020년

- 사업내용: 기본계획 수립비, 세부설계비, 공사감리비, 사업관리비

6. 사업의 효과

가. 농촌지역의 경관 및 정주여건을 개선하여 주민의 삶의 질 향상

7. 사업시행자: 평창군 및 한국농어촌공사 원주지사

8. 기타

가. 시행계획 승인 내용은 평창군 농축산과에 비치하고 일반인에게 보이며, 사업 시행과정

에서 변경이 있을 수 있음.